문서번호	한양도성도감-5601
결재일자	2019.5.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	도성보존팀장	한양도성도감과장
구선이	代박근우	05/31 진용득
협 조

『한양도성 혜화문 보수공사』추진계획

2019. 5.

문 화 본 부

한양도성도감

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	문화재 전문가 자문반영
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	안전조치 완료 및 보수설계 추진
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	문화재청 국고보조금
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『한양도성 혜화문 보수공사』추진계획

한양도성 혜화문의 보수 정비를 위한 설계를 완료하고 보수공사를 시행하고자 함

Ⅰ		추진경위

□ 2018. 3. 7. : 2018년 해빙기 국가안전대진단 결과 보수정비 필요

□ 2019. 3. 5~ 5. 23 : 한양도성 혜화문 보수공사 설계용역 시행

◎ 설계용역 개요

- 사 업 명 : 한양도성 혜화문 및 창의문 보수공사 설계용역

- 용역기간 : 2019.3.5.~5.23.

- 사 업 자 : (주)예그린건축사사무소(대표:민경민)

- 설 계 비 : 금14,260,000원

※ 문화재청 설계승인 완료(2019.5.14.)

Ⅱ		추진계획

□ 사 업 명 : 한양도성 혜화문 보수공사

□ 위    치 : 서울특별시 종로구 혜화동

□ 사 업 비 : 115,290천원(국비 80,703, 시비 34,587)

□ 사업기간 : 2019년 6월~9월(착수일로부터 90일)

□ 공사범위 및 내용 : 혜화문 문루 부분 보수 및 지붕 기와고르기

- 바닥 공사 ：훼손된 문루 바닥을  걷어내고 강회다짐한다.

- 지붕 공사 : 트렌치 조사를 실시하고 기와고르기를 한다(30% 보충).

- 목 공 사 : 판벽 및 마루의 부식 부재를 교체한다.

- 단청공사 : 기둥 및 교체된 부재를 단청한다.

- 우측 협문 : 부식부위를 제거 후 수지처리한다.

Ⅲ		발주방법

□ 입찰방법: 제한경쟁입찰

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」시행령제20조,제21조, 같은 법 시행규칙 제24조~제26조

□ 입찰참가자격

- 지역제한 : 입찰공고일 전일부터 입찰일까지(낙찰자는 계약체결일까지) 주된 영업소가 서울특별시에 소재하여야 한다.

- 면허종류 : 「문화재수리 등에 관한 법률」제14조 규정에 의한 “문화재수리업” 중 “종합문화재수리업”으로 등록된  업체

□ 예산상 조치 :「남산 회현자락 한양도성 보존정비(시설비)예산을 문화재청 지침변경하여 추가 집행

- 총 소요예산 : 금115,290,000원(국비 80,703, 시비 34,587)

· 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존‧정비, 한양도성 보수‧정비, 시설비 : 금50,000,000원(국비 35,000, 시비 15,000)

· 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존‧정비, 남산 회현자락 한양도성 보존·정비, 시설비 : 금65,290,000원(국비 45,703, 시비 19,587)

※ 문화재청 집행잔액 사용승인 : 문화재청 보존정책과-3310(2019.5.28.)

Ⅳ		향후계획

□ 2019. 06. : 보수 공사 발주

□ 2019. 06. : 공사 계약 및 착공

□ 2019. 06. ~ 09. : 공사 완료.  끝.