투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역 준공기한 연기 의뢰

1. 토목부-9431호(2019. 05. 29.)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 『월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역』용역에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명 : 월드컵대교 남단 연결로 및 접속교 보완설계 용역

2) 용역규모

가) 월드컵대교 남단 연결로(Ramp-A ~ Ramp-F) 형식변경 등

나) 강남방향은 지하차도를 교량으로 형식변경

다) 연결로 신설 및 변경에 따른 접속교 종단선형 검토

3) 계약기간 : 2017. 8. 7. ~ 2019. 05. 31.

4) 용 역 비 : 1,136,335,000원

5) 계 약 자 : ㈜동일기술공사, ㈜동성엔지니어링, ㈜태조엔지니어링, ㈜지아이건설기술그룹, ㈜수성건설엔지니어링

나. 준공기한 연기 : 150일

1) 계약기간 : 당초 ′17. 8. 7.~′19. 5  . 3 1 . ⇒ 변경′17. 8. 7.~′19. 1 0 . 3 1 .

2) 귀책소재 : 서울특별시

3) 지체상금 : 미 부 과

4) 연기사유 : 지자체 민원 의견반영에 따른 선형변경, 연결로 추가설계에 따른                          변경사항 발생으로 5개월의 설계기간 연장이 필요

다. 예산과목 : 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별회계), 월드컵대교건설, 시설비

붙임 : 1. 준공기한 연기 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 설계감리자 준공기한 연기요청에 대한 검토 의견 1부.

4. 설계감리자 검토 의견서 1부.

5. 설계용역자 준공기한 연기요청 1부.

6. 예정공정표 1부.

7. 합의각서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	차승환		토목설계과장	代이정원		토목부장	05/31 김영수
협조자
시행	토목부-9578	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2588	/전송	02-3708-2599	/	chsh155@seoul.go.kr	/	부분공개(6)