문서번호	도로보수과-5306
결재일자	2019.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	도로보수과장
정의현		이상하	06/03 강종훈
협 조

2019년 도로부속시설물 일상유지보수공사

작업지시 검토 보고(제2차)

2019. 6.

서부도로사업소

(도로보수과)

『2019년 도로부속시설물 일상유지보수공사』

작업지시 검토 보고(제2차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 도로부속시설물 일상유지보수공사(연간단가)

○ 계약기간 : 2019.03.29. ~ 2019.12.31.

○ 시 공 사 : 다사랑건설 주식회사  대표 김용구

○ 도 급 비 : 362,884,000원

○ 공    종 : 과속방지턱 설치 4[eqn: m], 옹벽표면보수 579[eqn: m ^{2}], 사괴석보수 35[eqn: m ^{2}], 중앙분리대설치 38경간, 도로부속물 세척 15,773[eqn: m ^{2}] 등 기타

※ 응암로 중앙분리대설치 240경간, 충격흡수시설 설치 10개 등

□ 보고내용

○ 과속방지턱 도색 및 설치 : 5개소

- 과속방지턱 전수조사 결과 과속방지턱 3개소 탈색 및 2개소 파손 되어 정비(모래내로 외 4개소)

○ 옹벽 콘크리트ㆍ난간ㆍ배수파이프, 석축, 차수이음부 보수 : 7개소

- 해빙기 도로사면 안전점검 결과 옹벽 콘크리트 2개소 균열 및 난간ㆍ배수파이프 3개소, 석축 1개소, 차수이음부 1개소 파손되어 정비(세검정로 외 6개소)

○ 방음판 및 지주 보수 : 1개소

- 방음판 및 지주 파손 민원으로 정비(세검정로)

○ 충격흡수시설 반사지 보수 : 1개소

- 충격흡수시설 반사지 파손 민원으로 정비(연서로)

○ 중앙분리대 레일 보수 : 2개소

- 중앙분리대 파손 민원으로 정비(성산로 외 1개소)

○ 중앙분리대 철거 : 1개소

- 학교 주변 시도 정비를 위한 노후포장도로 정비공사 예산 추가 재배정에 따라 성산로 노후화된 중앙분리대 교체를 위한 철거(성산로)

※ 중앙분리대 교체 : 84경간(252m)

- 규    격 : 정도산업, JD-SB-05-02, W3000×H900mm, 개방형, 항타용, SB4등급, 도금

※ 기존 성산대교북단교차로~성산대교에 설치되어진 2단 철제도로중앙분리대(무등급)으로 SB4등급 내에서 유사규격 제품으로 선택

- 소요예산 : 약 39,892천원

- 추진계획 : 중앙분리대 84경간 조달 구매 후 현장설치

□ 조치계획

○ 위와 같이 시설물 정비구간에 대하여 2019년 도로부속시설물 일상유지보수공사를 실시하여 안전하고 쾌적한 도로환경 조성 및 안전사고를 사전에 예방코자 함.

○ 도급비 집행 현황

(단위 : 천원)

공사명	도급비 (계약금액)	기 집행액	금회 집행액	집행잔액
도로부속시설물 일상유지보수공사 (연간단가)	362,884	129,670	31,071	202,143

○ 제2차 작업지시

- 건    명 : 2019년 도로부속시설물 일상유지보수공사 작업지시(제2차)

- 작업위치 : 모래내로 등 12개소

- 작업기간 : 2019.06.04. ~ 2019.07.29.

- 필요금액 : 31,071천원(시공 물량에 따라 추후 정산)

- 공종 및 물량

연번	노선명	공 종	규격	수량	단위	비고
1	모래내로	과속방지턱 도색	-	34.7	㎡	전수조사
		콘크리트 치핑	-	2.3	㎡	안전점검
		콘크리트 단면보수	T=10mm	2.3	㎡	안전점검
2	삼일대로	과속방지턱 도색제거	-	24.0	㎡	전수조사
		과속방지턱 도색	-	24.0	㎡	전수조사
3	장춘단로	일일노무	단순ㆍ청소ㆍ정리	1.0	일	안전점검
4	성산로	중분대레일 보수	200*3.2t*3,330	6.0	m	민원
		중앙분리대 철거	-	139.0	경간	학교정비
5	세검정로	콘크리트균열 보수	B=0.3mm, T=100mm	50.0	m	안전점검
		난간파이프 교체	(AL)D100*150	24.0	m	안전점검
		방음판 교체	(투명)프레임포함	9.0	㎡	민원
		방음판지주 교체	125*125, H=2.6m	1.0	본	민원
6	한강대로	과속방지턱 도색	-	19.3	㎡	전수조사
7	양화로	중분대레일 보수	200*3.2t*3,330	3.0	m	민원
8	성암로	난간파이프 교체	(AL)D100*150	12.0	m	안전점검
9	녹사평대로	일일노무	단순ㆍ청소ㆍ정리	1.0	일	안전점검
10	연서로	반사지정비	고휘도	2.5	㎡	민원
11	월드컵북로	일일노무	단순ㆍ청소ㆍ정리	1.0	일	민원
12	무교로	과속방지턱 설치	B=3.6m, H=0.1m	13.7	m	전수조사
안전시설비			-	1,974	㎡	-

□ 향후계획

○ 2019. 06. 04. : 작업지시 및 공사 시행

○ 2019. 07. 29. : 작업완료 및 결과 보고

붙 임 1. 제2차 작업지시 내역서 1부.

2. 제2차 작업지시 위치도 및 현황사진 1부.

3. 성산로 노후화된 중앙분리대 교체 추진 계획 1부.

4. 노후포장도로 정비공사 예산 추가 재배정 알림 1부.  끝.