문서번호	기전과-3190
결재일자	2019.6.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
김용문		06/03 임태수
협조

『2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)』

제1차작업 완료 및 실정 보고

2019.  6.

남부도로사업소

(기 전 과)

『2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)』

제1차작업 완료 및 실정 보고

『2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수 공사(연간단가)』 제1차 작업지시에 대한 공사를 실시하고 그 결과를 보고드림

		관련근거

□ 1차 작업지시

○ 1차 작업지시 : 기전과1358(2019.3.12)

○ 1차 작업지시(추가1) : 기전과1974(2018.4.05)

○ 1차 작업지시(추가2) : 기전과2676(2018.5.13)

□ 1차 작업 완료 보고

○ 감리업체 : 한국검정㈜, 한검 제 19306(2019.5.31)호

		공사개요

□ 공 사 명 : 2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)

□ 공사위치 : 남부도로사업소 관할지역(금천, 관악, 동작구, 서초, 영등포 등)

□ 공사내용 : 교통안전표지 설치 및 유지보수

□ 계약금액 : 금81,570천원

□ 시 공 사 : ****************

□ 감 리 사 : ***************

□ 제1차 작업지시 내용 : 총 40건

○ 작업기간 : 2019. 3. 12. ~ 5.31.

○ 규    제 : 12건 - 동작구 노량진동 67-3 좌회전감응 안전표지 신설 등

○ 일상보수 : 28건 - 영등포구 여의교지하차도 상부(동측) 지주 재설치 등

		실정보고

□ 제1차 작업결과 : 총 40건(완료 35건, 미완료 5건)

○ 규제사항 : 12건(완료  7건, 미완료 5건)

○ 일상보수 : 28건(완료 28건, 미완료 0건)

<주요작업내용> - 세부사항 “별첨”

지시 번호	구 분	위 치	작 업 내 용	작업 결과	비고
1-01	일상 보수	영등포구 여의교지하차도 상부(동측)	.정지표지 지주파손 – 1(지주설치) (철거상태, 표지재사용)
1-02	일상 보수	영등포구 가마산로 333 (새소망교회 앞)	.지주표지파손 ----- 1(지주설치) (기존표지기초제거)
1-03	일상 보수	서초구 강남대로 314 (뱅뱅사거리⇒우성아파트사거리)	.우회전금지 및 보조표지 - 이설
1-04	일상 보수	서초구 강남역 9번출구 앞	.#326(일방통행)표지파손 - 교체
1-05	일상 보수	동작구 동작대로 90앞 (이수역 6번출구 측)	.정비표지 지주파손 -- 지주설치 (표지 재사용)
1-06	규제 사항	동작구 노량진동 67-3 (노량진역 앞)	.보조표지 ----- 1(신) (좌회전감응,900*300) -- 1(신)
1-07	규제 사항	동작구 노량진동 148-1 (수산시장입구)	.보조표지 ------ 1(신) (좌회전감응,900*300)

□ 작업 미완료 실정보고 : 5건

<미완료 사항>

지시 연번	구분	위 치	작업지시 내용	미완료 사유
1-08	규제 사항	동작구 장승배기로 14 (신상도초교 후문 앞)	.#216(유턴금지) ---- 2(신) .#322(횡단보도) ---- 2(신)	선행 공정인 신호등 및 노면표지 미작업으로 설치 불가 ⇒ 선행공정 완료시 작업 예정
1-09	규제 사항	동작구 사당로23길 137 (구립양지어린이집 앞)	.#329(비보호) ------- 2(신)	선행 공정인 신호등 및 노면표지 미작업으로 설치 불가 ⇒ 선행공정 완료시 작업 예정
1-10	규제 사항	관악구 남부순환로 2017 (남현동 입구)	.#311+410(유턴,보조)-- 2(신) .#214(어린이보호) --- 1(신) .#226(천천히) ------ 1(철거)	선행 공정인 신호등 및 노면표지 미작업으로 설치 불가 ⇒ 선행공정 완료시 작업 예정
1-25	규제 사항	관악구 솔밭로 7길 16 (낙성대홈타운)	.#329(비보호) ----- 2(신)	선행 공정인 신호등 및 노면표지 미작업으로 설치 불가 ⇒ 선행공정 완료시 작업 예정
1-27	규제 사항	관악구 과천대로 939 (승방길 입구)	.#322(횡단보도) ---- 1(신)	선행 공정인 노면표지 미작업 ⇒ 선행공정 완료시 작업 예정

□ 예산현황

구 분		재배정예산	계약금액	제1차 작업금액	계약잔액	비 고
총공사비		92,900,000	81,570,820	9,540,000	72,030,820
도급비	공 급 가 액		74,155,291	8,672,728	65,482,563
	부가가치세		7,415,529	867,272	6,548,257
	계		81,570,820	9,540,000	72,030,820

□ 책임감리원 검토의견

○ 금회 1차작업 대상 40건중 35건을 완료하였으며 미완료한 5건에 대하여는 추후 현장여건에 따라 공사시행 예정임.

※ 붙 임 - 책임감리원 완료보고서(검토서, 내역서, 관련사진 등)

		보고자의견

□ 책임감리원 실정보고 검토 결과

○ 제1차 작업지시 총 40건 중 35건을 완료하였으며 미완료 사항 5건은 현장여건에 따라 노면 및 신호공사와 협의하여 추후 시행코자 하며,

○ 경찰청 규제심의 사항 및 일상 유지보수 공사는 계속 실시하여 안전사고예방에 만전을 기하고자 함.

붙  임 : 1. 책임감리원 작업완료 보고서 1부.

2. 1차작업완료 감리조서 1부.  끝.