문서번호	토목부-9739
결재일자	2019.6.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이현국		여용석	06/03 김영수
협조

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

기존 방음벽 구조물깨기 공법 변경 검토보고

2019. 6.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

기존 방음벽 구조물깨기 공법 변경 검토보고

올림픽대로(하남방향) 이설 전 정온시설물(아산병원) 인접 공사구간의 기존 방음벽 구조물깨기시 공사소음불편을 방지하고자 구조물깨기 공법 변경(Breaker깨기 → 압쇄기+Wire Saw)에 대한 검토보고임

Ⅰ		관 련 근 거

○ 기존방음벽 구조물깨기 공법 변경 실정보고【올대감 19-158(‘19. 5. 27.)호】

○ 병원관계자 면담 결과 보고【토목부-6207(‘19. 4. 11.)호】

Ⅱ		사 업 개 요

○ 사 업 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

○ 공사위치 : 송파구 풍납동 일대

○ 사업규모

- 램프신설 : L=1,383m (교량 446m 포함)

- 램프이설 : L=1,309m (교량 139m 포함)

- 올림픽대로 이설 : 하남방향(L=1.21km), 김포방향(L=1.16km)

○ 사업기간 : 전체‘16. 4. 1. ~ ‘20. 3. 5. (4차 : ‘19. 1. 22. ~ ‘19. 12. 31.)

○ 총사업비 : 전체 47,343백만원 (‘19년 : 8,200백만원)

○ 감리사/시공사 : ㈜이산외 2개사 / ㈜덕일외 2개사

○ 공 정 율 : 56%

Ⅲ		검 토 내 용

□ 공법 변경 사유

○ 정온시설(아산병원) 인접구간에 위치한 기존 방음벽 철거시 현재의 공법(Breaker깨기)은 큰 소음발생이 불가피함

○ 방음벽 철거 공법을 변경(Breaker깨기→압쇄기+Wire Saw)하여 정온시설 이용객의 불편을 최소화 하고자 함

< 위치도 및 현황사진 >

□ 공법변경 검토

○ 소음 저감 효과가 우수한 압쇄기+Wire Saw 공법을 선정

-  Breaker깨기         : (당초) 948㎥ → (변경)   - ㎥(감 : 948㎥)

-  압쇄기 + Wire Saw : (당초)   - ㎥ → (변경) 948㎥(증 : 948㎥)

< 공법 비교표 >

구 분	Breaker 깨기	압쇄기 + Wire Saw	Wire Saw+운반+Breaker깨기
장 점	경제성 우수	경제성 양호 / 소음감소	소음감소보통
단 점	소음 및 비산 발생	작업효율 낮음	경제성 불리
도급비	******	******	*******
적 용		◯
선정사유		경제성 및 소음감소효과 우수
< 원설계사 의견 > - 당초 깨기 공법을 일반적인“브레이카”깨기로 설계하였으나, 현장여건(아산병원 근접공사)을 감안하여 현장(안)대로 변경함이 타당함.

○ ********************

*****	****	**	*****			*********
			***	***	*********	***	***	*********
****
***********	********	*	***	*	****	*****	*	******
**********	********	*	***	*	****	******	*	*******
**********	***	*	*	***	***	*	******	******
********	*********	*	*	*	*	*	***	***
**********	************	*	*	*	*	*	*****	*****
*****						******	******	*****
*****						******	******	*****
*****						******	******	*****

**********************

Ⅳ		조 치 계 획

○ 책임건설사업관리기술자의 검토의견과 같이 정온시설물(아산병원) 특성상 인접구간 기존방음벽 철거시 공사 소음을 저감하기위한 공법 변경은 타당하다 판단되므로,

○ 실정보고를 승인하고, 추후 설계변경에 반영하고자 함

붙 임  책임건설사업관리기술자 검토보고서 1부.  끝.