문서번호	건축부-9402
결재일자	2019.6.3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		의료시설과장	건축부장
박진국		이형재	06/03 임인구
협조

「시립중랑노인전문요양원 증축공사」

건설폐기물 처리 용역기간 연장 검토 보고

2019. 06.

도시기반시설본부

(건 축 부)

「시립중랑노인전문요양원 증축공사」

건설폐기물 처리용역 기간 연장 검토 보고

시립중랑노인전문요양원 증축공사 건설폐기물처리용역의 용역기간 연장 요청에 따른 적정 여부를 검토하고 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 시립중랑노인전문요양원 증축공사 건설폐기물 처리용역

○ 위    치 : 서울시 중랑구 양원역로 38(망우동 227)

○ 규    모 : 지하1층/지상5층, 연면적 2,280.35㎡

○ 용역기간 : *************************

○ 용역금액 : ***********

○ 용역사/감리사 : ***********************

○ 용역내용 : 건설폐기물 수집․운반 및 처리

- 처리물량 : *********************************************

*******************************************************************

□ 설계변경 내용

○ 관련근거

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경관리 등)

- PC19(시립요양원)-406(2019.05.31.) 책임건설사업관리기술자 “건설폐기물처리 용역기간 연장 요청건 보고”

○ 변경사유

- 건축 공사 준공기한 일정(2019.7.19.)에 맞춰 용역기간 조정

- 증축 건물 주변 아스콘 포장 설계변경에 따른 폐기물 추가 발생 예정

○ 공사비 증감내역(변경 없음)

(단위 : 원)

****	*****	*****	*********	***
*******	**********	**********	*
*******	**********	**********	*
********	*********	*********	*
*****	**********	**********	*

○ 폐기물처리 용역기간 변경 검토

*****	*****	**	*****
************ *********** ******	************ *********** ********	*****	***************** **************************

□ 감리자 검토의견

○ 검토결과

- 향후 증축건물 주변 인도 및 도로포장 설계변경 사항이 예정되어 있어, 폐콘크리트, 폐아스팔트 등 물량 변동 요소가 있으며,

- 공사 특성상 건축공사 직전까지 발생된 폐기물을 적법 처리 위해 건축의 준공 일정에 맞추어 폐기물 처리 용역기간 연장함이 타당하다 사료됨

□ 조치의견

○ 책임건설사업관리기술자가 제출한 “건설폐기물처리 용역기간 연장 요청건 보고” 에 대한 설계변경 검토가 적합하므로 건설폐기물용역 계약기간을 연장 하고자 함.

붙임 : 책임건설사업관리기술자 건설폐기물 용역기간 연장 요청건 보고 1부.  끝.