문서번호	건축부-9377
결재일자	2019.6.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
정호기		代정호기	06/03 임인구
협조

『마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사』

건설사업관리용역(1차) 변경계약 검토보고

2019.  6.

도시기반시설본부

건 축 부

『마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사』

건설사업관리용역(1차) 변경계약 검토보고

「마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사」건설사업관리용역(1차)에 대한 변경계약 요청이 있어 검토결과를 보고드림

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사 건설사업관리용역

○ 용역업체 : ㈜토문엔지니어링건축사사무소 외 1

○ 계약금액 : **********************************

○ 용역기간 : **************************************

□ 용역계약 변경

○ 변경내용

구 분		변 경 전	변 경 후	증·감
1차	기간	‘17.09.01~‘19.08.28	‘17.09.01. ~‘19.10.14	증) 47일
	금액	**************	**************	****
총차	기간, 금액	******

○ 변경사유 : **************************************************************

○ 지체상금 부과 : 미부과

□ 처리의견

○ 변경내용이 적정한 것으로 판단되는바 건설사업관리용역(1차) 변경 계약을 시행코자 함

붙임 : 건설사업관리용역(1차) 변경계약 요청 공문 1부. 끝.