문서번호	도시철도설비부-5272
결재일자	2019.6.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		송변전과장		도시철도설비부장
김병훈		서태창		06/04 구자훈
협 조

도시철도 하남선(5호선연장) 2단계 전차선공사(1차)

설계변경 검토 보고

2019. 6.

도시기반시설본부

[도시철도설비부]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

도시철도 하남선(5호선연장) 2단계 전차선공사(1차)

설계변경 검토 보고

도시철도 하남선(5호선연장) 2단계 전차선공사의 원활한 추진과 성공적 개통지원을 위하여 다음과 같이 설계변경에 대하여 감리단 검토 결과를 보고 드림.

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 도시철도 하남선(5호선연장) 2단계 전차선공사

○ 공사위치 : 경기도 하남시 덕풍동~창우동

○ 계약업체 : ㈜승원에이씨오, 한라전력(주)

○ 공사기간

공 사 명	총 차	1 차	비고
2단계 전차선 공사	*********************	*********************

○ 계약금액

공 사 명	총 차	1 차	비고
2단계 전차선 공사	***************	***************

Ⅱ		설계변경 사항

○ 1차 설계변경

- 공사기간 : 변경없음

- 계약금액(차수간 내역변경:총차 금액 및 내역 변경없음)

공 사 명	당 초	변 경	비고
2단계 전차선 공사(1차)	***************	***************	증감없음

Ⅲ		감리단 검토내용

○ 공정 수량 변경

구분	단위	당초	변경	비고
AL T-BAR 가설	m	3,080.8	3,398.7	증 317.9

○ 설계변경 사유 : 효율적인 공정관리와 원활한 공사진행을 위해 차수간 내역 변경

○ 공사비 증감내역

구 분	당 초	변 경	비고
재료비	***********	***********	***********
노무비	***********	***********	***********
제경비	***********	***********	***********
도급비	***************	***************	*

Ⅳ		조 치 계 획

○ 상기와 같이 검토된 내용 대로 설계변경하여 원활한 공정관리와 성공적 개통을 위하여 관련 업무추진에 만전을 기하고자 함.

- 설계변경 사유 : 원활한 공정관리를 위해 차수간 내역 변경

붙임 : 설계변경(1차2회) 검토결과 보고(감리단) 1부.  끝.