문서번호	공원녹지정책과-10552
결재일자	2019.6.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장
임성수	박미성	06/04 유영봉

2019 시공원 보수정비 사업내용

변경계획 제출에 따른 검토보고(서대문구)

2019. 6.

푸른도시국

공원녹지정책과

시공원 보수정비 사업내용 변경 검토보고

2019년 서대문구에서 추진중인 시공원 보수정비 사업내용 변경 제출에 대하여 검토하고 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

※ 추진근거 : 서대문구 푸른도시과-8763호(‘19.5.30.) “홍제동 인왕산 입구 정비사업 추진계획(변경) 제출”

□ 당초계획

○ 위    치 : 홍제동 460-5 일대(홍제동 인왕산 입구)

○ 사 업 비 : *****

○ 사 업 명 : 홍제동 인왕산 입구 정비사업****************

○ 사업내용 : 산책로 정비(노후 콘크리트 계단 정비, 안전난간 설치)

□ 변경계획

○ 사업내용 변경 : 인왕산 입구 목재데크 확장, 수목이식 및 식재

○ 변경사유

- 당초 사업내용인 산책로 노후계단 정비보다 휴게공간 확장을 요구하는 민원이 많아 주민들과 시의원 현장 협의 후 사업내용 변경

□ 추진경위

○ 2019. 3. 12. : 민원 검토 및 시의원 협의

○ 2019. 3. 25. : 현장 검토 완료 후 사업내용 변경

□ 검토의견

○ 해당 시의원 및 주민의견을 수렴, 협의 완료된 사항이므로 사업내용 변경 승인 및 설계심의(서면) 이행하고자 함.

붙임 : 1. 2019 시공원 보수정비 사업내용 변경계획 제출 1부.

2. 변경계획 방침서 및 위치도 각 1부.  끝.