문서번호	시설과-3968
결재일자	2019.6.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장
김학석	조대복	代이춘한	06/04 代김명준
협 조

서울대공원 유인원관 노후설비 개선 공사 설계변경 검토 보고

2019.06.

서울대공원

(시설과)

유인원관 노후설비 개선 공사 설계변경 검토 보고

유인원관 노후설비 개선공사 시행중 현장(동물원) 요구사항과 기존추진계획과 상이한 사항을 반영하고자 설계변경을 추진하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 서울대공원 시설과-7072(2018.11.16.)

▶ 서울대공원 유인원관 노후설비 개선공사

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 서울대공원 유인원관 노후설비 개선공사

□ 공사기간 : 2018. 12. 04 ~ 2019. 6. 5.

□ 시 공 사 : ****************

□ 계약금액 : ************

□ 주요 공사내용

○ 유인원관 냉·난방시설 개선

○ 유인원관 환기 및 위생시설 개선

Ⅲ		변경내용

□ 주요 변경사항

대상시설	주요공정	변경내용
유인원관 기계실	********* *******	********************* *********************** ************************** ******************************

대상건물	주요공정	변경내용
유인원관 상층부(침팬지 동) 난방설비 교체	********** ***********	************ ************************ *********************** ******************* ******************** *********************** ************************** ************************** **********************
환기설비 교체	**************	****************************************** ************************ ***************************

□ 도급비 변경내용

구 분	당 초	변 경	증감액	변경사항
재료비	***********	***********	************	*************** *********************** ************************** ****** ***
노무비	**********	**********	***********	************************ **************
제경비	**********	**********	***********	*******************
부가세	**********	**********	***********
기타	*******	*********	***********	***********************
합 계	***********	***********	************

Ⅳ		보고자 의견 및 예산검토

□ 보고자 의견

○ 현장여건에 따른 추가 사항(가스공급시설 개선)은 기반시설로 필수 반영

○ 환기설비는 시설의 유지관리 편의성 및 설비 작동의 효율성 확보를 위해 자동제어 공사시 반영

Ⅴ		행정사항 및 추진일정

□ 설계변경에 따른 변경계약 추진

○ 도급계약액 변경 : *************

********************************************

○ 계약기간 변경없음

▶ 2019.06.05.까지 공사완료.

▶ 2019.06.07.까지 폐기물 반출 및 현장정리 완료

□ 추진일정

○ 계약변경 요청 ---------------------------------‘19. 06월05일 까지

○ 공사시행  --------------------------------------‘19. 06월05일 까지

○ 공사준공  ------------------------------------- ‘19. 06월07일 완료.

붙임 : 1. 서울대공원 동물사 노후설비 개선공사 설계변경 내역서. 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.