투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	총무과장
(경유)
제목	서울대공원 유인원관 노후설비 개선공사 변경 계약 의뢰

우리대공원에서 시행중인 서울대공원 유인원관 노후설비 개선공사와 관련하여 다음과 같이 설계변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울대공원 유인원관 노후설비 개선 공사

나. 도급금액 : *************

다. 공사기간 : 2018.12.04 ~ 2019.06.05.

라. 시 공 사 : *******************

마 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
도급금액	**************	**************	************

붙  임 : 1. 유인원관 노후설비 개선공사 준공기한 연기 검토보고서 1부.(별첨)

2. 변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	김학석		주무관	조대복		시설과장	06/04 代이춘한
협조자
시행	시설과-3964	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 시설과 (막계동)	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7424	/전송	02-507-7230	/	k3009k@seoul.go.kr	/	부분공개(5)