문서번호	급수운영과-10407
결재일자	2019.6.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	★주무관	급수운영과장
황중연	代황중연	06/04 代서규석
협 조

설계변경(5회, 최종) 검토 보고

[2018년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사]

2019. 6.

설계변경(5회, 최종) 검토 보고

[2018년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사]

『2018년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가계약)』시행시 현장여건 변화에 따른 계약물량 증․감 및 기타변경 사항이 발생되어 설계변경을 실시하여 정산에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 남부수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사(장기계속단가)

○ 공사개요 : 아스팔트포장 415a, 콘크리트포장 17a, 보도블록포장 13a

○ 공사기간 : 2018. 3. 23. ~ 2019. 6. 30.

○ 도 급 자 :*****************

○ 도 급 액 : ***************

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제34호)

- 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정

□ 설계변경 사유

○ 계약물량 변동(증․감) 발생

- 물량증가 : 아스팔트 포장깨기 외 74종

- 물량감소 : 아스팔트 포장절단(100~150mm) 외 98종

○ 기타 변경사항

- 폐부직포처리 : 45톤

- 본부 감사 지적사항 감액조치 : -374,000원

□ 설계변경 세부내용

○ 주요공종 물량 증·감 및 기타 변경사항

공 종	수 량			증․감	비고
	단위	당초	변경
아스팔트포장	a	380	415	증) 35
콘크리트포장	a	19	17	감) 2.0
보도블록포장	a	15	13	감) 2.0
폐부직포처리	톤	0	45	증) 45
본부 감사지적사항 감액조치	식	0	1	감) 1	-374,000원

□ 설계변경 금액 : 증) 218,377,100원

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감	비 고
공급가액	1,996,415,364	2,194,940,000	***********
부가가치세	199,641,536	219,494,000	**********
도 급 비	*************	*************	***********	증 9.94%

□ 조치계획

○ 설계변경 심사 요청 및 그 결과에 따라 설계변경 계약 추진

- ******************************************************됨에 따라 본부 안전총괄과에 설계변경 심사요청하여 그 심사결과에 따라 설계변경 계약을 추진하고자 합니다.

붙임  1. 설계변경내역서(5회) 1부.

2. 보험료완납증빙자료 각 1부.

3. 제비율검증 자료 1부.  끝.