문서번호	시설보수과-4924
결재일자	2019.6.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
강연홍		박병연	06/05 김용제
협조
	관리단속과장		김상두

서울시 안전점검시 지적사항에 따른

목동교(신교) 조치계획 보고

2019. 6.

강서도로사업소

[시설보수과]

서울시 안전점검시 지적사항에 따른

목동교(신교) 조치계획 보고

서울시(교량안전과)에서 목동교(신교) 안전점검후 적출(통보)된  지적사항에 대한 조치계획을(정밀안전진단) 보고 드림.

※관련근거 : 서울시 교량안전과-7107호(2019.4.19.)

[목동교(신교) 강구조시설물(용접분야) 안전점검 결과 알림]

▶ 시설보수과-3811호(‘19.5.2) : 목동교(신교) 조치계획 보고

▶ 서울시 교량안전과-9452호(‘19.5.27) : 목동교(신교) 관련 예산요청 회신

Ⅰ		보고내용

목동교(신교) 점검시 지적사항에 대한 조치계획 보고

▶ 서울시 교량안전과에서 목동교(신교) 점검시 노후 강구조물에 대한 정밀안전진단이 필요하다고 통보되어,

▶ 검토결과 강재비파괴시험, 구조해석 등을 통한 안전성 검토가 필요함에 따라 목동교(신교) 정밀안전진단 추진방침 수립

※ 목동교(신교) 조치계획 보고(시설보수과-3811호. ‘19.5.2)

추진경위

▶ 2019. 04. 19 : 목동교(신교) 안전점검 결과 통보(시 교량안전과)

▶ 2019. 05. 02 : 목동교(신교) 조치계획 보고

- 목동교(신교)에 대한 정밀안전진단을 실시하여 안전성 검토

▶ 2019. 05. 03 : 부족예산에 대하여 시(교량안전과)에 예산 요청

▶ 2019. 05. 28 : 시(교량안전과)로부터 잔여예산이 없음을 통보

Ⅱ		검토 및 조치계획

목동교(신교) 정밀안전진단 실시 추진

1. 서울시 지적에 의거 목동교(신교) 정밀안전진단을 시행코자 교량안전과에 소요예산 배정요청후 (예산 배정이)불가하다고 통보받았으나, 서울시 지적사항과 같이 긴급 정밀안전진단 시행이 필요한 것으로 검토되므로

2. 아래와 같이 소요예산 확보후 정밀안전진단을 추가 시행하고자 함

가. 소요예산 : 52,010천원

나. 소요예산 확보방안

- 현재 정밀안전진단 시행중인 ‘목동교정밀안전진단 및 구로1교 외1개소 정밀점검’용역시 발생된 낙찰차액을 활용 : 낙찰차액 24,440천원

- 2019년 배정된 정밀점검 예산중 미사용 잔여 예산 활용 : 27,570천원

(구로고가 철거로 인하여 정밀점검 미시행으로 발생된 예산 활용)

향후 추진계획(행정사항)

1. 목동교(신교 : C등급)에 대하여 정밀안전진단을 시행하여 노후교량에 대한 안전성 검토 및 필요시 보강 등을 추진하여 안전한 교량관리에 만전을 기하고자 하며,

2. 효율적인 업무추진을 위해 현재 목동교(구교) 정밀안전진단용역 진행중인 용역사에 추가 과업(설계변경)을 지시하여 용역을 수행하고자 함.

※ 목동교(구교) 정밀안전진단 용역사 : 세안안전진단(주) 대표 박기열

3. 서울시(교량안전과)에 본 조치계획안 제출.

첨부 : 1) 방침서 1부.

2) 관련공문 1부.

3) 설계변경 내역서 1부.  끝.