문서번호	정수시설과-2739
결재일자	2019.6.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
노성제		김석정	06/05 김중영
협조

2019년 지역지원(국비보조) 사업 - 태양광 발전시설 설치

실시설계 용역 발주 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2019년 지역지원(국비보조) 사업 - 태양광 발전시설 설치

실시설계 용역 발주 계획

2019년 지역지원(국비보조) 사업인 태양광 발전시설 설치와 관련하여 실시설계 용역을 발주하고자 계획을 수립하여 보고 드림

□ 관련근거

○ 2019년 지역지원(국비보조) 사업 태양광 발전시설 설치 추진 계획

- 정수시설과-2413(2019.5.17.)호

○ 제1052차 기술용역타당성 심사 결과 통보(구조 안전성 검토)

- 기술심사담당관-9923(2019.5.22.)호

○ 제1078차 기술용역타당성 심사 결과 통보(실시설계)

- 기술심사담당관-10149(2019.5.27.)호

□ 사업개요

○ 사업기간: 2019. 5. ~ 2019. 11.

○ 사업규모: 태양광 발전설비 148kW

○ 사업예산: *************************************

□ 기술용역타당성 심사 결과(기술심사담당관)

○ 구조안전성 검토 용역

- 용역비 조정: *******************

- 검토 의견: 태양광 발전시설의 구조계산은 설계자의 의하여 수행하고, 본 용역은 건축물의 구조 안전성 검토를 위주로 할 것.

○ 실시설계 용역

- 용역비 조정: *******************

- 검토 의견: 특별한 사항 없음.

□ 보고자 의견

○ 본 사업은 기존 건축물의 옥상에 태양광 발전시설을 설치하는 것으로서, 태양광 발전 시설 설치에 따른 건축물의 구조안전성 확인 및 태양광 발전시설에 대한 적정한 구조계산 및 설계를 실시하여 안전성과 효율성을 확보하는 것이 중요함.

○ 태양광 발전시설 설치에 따른 구조 계산을 위해서는 설계서가 있어야 하고 실시설계는 구조 안전성이 확인된 후에 시행하는 것이 바람직하므로, 일반적인 관행과 원활한 사업 추진을 위하여 **********************************하고자 함.

□ 발주 계획

○ 사 업 명: 태양광 발전시설 설치에 따른 실시설계 용역

○ 사업기간: 계약일로부터 50일

※ 따로 수행할 경우 구조진단 40일, 실시설계 30일이나 동시에 수행하므로 50일로 단축

○ 소요예산: ********

- 예산과목: 에너지절약과 생산으로 원전하나줄이기, 신재생에너지보급, 공공시설 신재생에너지보급-지역지원, 시설비(401-01)

○ 계약방법: 수의계약

- 관련근거: 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조 제1항 제5호 나목

- 대상업체: 「전력기술관리법」제14조 제1항에 따라 설계업을 등록한 업체

붙임  기술용역 타당성 심사 결과 2부.  끝.