상수도 노후밸브 교체 보고

시 행	시설관리과-12571	(		)
접 수		(		)
결재일자	2019.6.5.
수 신 자	내부결재

결재	주무관	시설관리과장
	김생수	06/05 최춘근

상수도 노후밸브 교체공사와 관련, 다음과 같이 실정보고서가 접수되어 검토 보고합니다.

□ 공사현황

○ 지시번호 : 시보NO.7

○ 공사위치 : 방배동 878-15

○ 공사기간 : ‘19.5.30. ~ 6.18.

○ 공사내용 : ∮100㎜노후밸브 교체

□ 실정 보고의견서

○ 금회 작업지시 시보 7번은 당초 폐전처리되어 일자배관으로 종결하려 하였으나 동일 상수도관로상 퇴수밸브가 없으므로 첨부된 실정 보고서 시공 상세도와 같이 폐쇄된 분기밸브를 퇴수밸브로 교체하여 활용하는 것이 타당하다고 사료됩니다.

□ 담당 검토의견

○ 상기 실정 보고의견서와 같이 폐쇄된 불용밸브를 철거하고 일자배관으로 관망 형성하기 보다는 퇴수변이 없음을 감안, 퇴수변으로 활용하여 인근 급수가구에 안정적인 맑은물 공급에 기여함이 타당하다고 사료됨을 보고합니다.

붙 임 : 1. 건설사업관리 기술자 보고서 1부.  끝.