문서번호	건축기획과-10512
결재일자	2019.6.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색건축팀장	건축기획과장
서민우		이길성	06/05 박경서
협 조
	주무관			윤별

서울특별시 건축물 차양 적용을 위한

차양 종류별 효과 및 계수 개발 용역 추진계획

2019. 05.

주택건축본부

(건축기획과)

서울특별시 건축물 차양 적용을 위한

차양 종류별 효과 및 계수 개발 용역 추진계획

서울시 녹색건축물 설계기준 도입을 위해 패시브 건축기법 중 여름철 냉방에너지 절감에 도움을 줄 수 있는 외부 차양 장치의 종류별 효과를 분석하고 계수를 개발하고자 함.

1				추진개요		‘

□ 추진배경

○ 국제적 이슈인 온실가스 저감, 제로에너지 건축 추진 등 관련 추세 반영

○ 최근 사회적 여건변화 및 정책이슈에 대한 대응으로 에너지를 적게 쓰고 환경에 미치는 영향이 적은 녹색건축물 확대

○ 녹색건축물 확대의 일환으로 패시브 건축비법 중 냉방에너지 절감에 도움을 줄 수 있는 외부 차양 장치의 적용을 위한 기준 수립

□ 추진근거

○ 녹색건축물 조성지원법 제6조(녹색건축물 기본계획의 수립)

○ 서울시 녹색건축물 조성계획(행정2부시장 방침 제72호, `16.3.16.)

□ 추진방향

○ 공급 가능한 외부 차양의 종류 조사

○ 외부 차양 종류별 효과 기존 연구 분석

○ 서울시의 위도 등을 고려한 종류별 효과 분석

○ 서울시의 녹색건축 설계기준 적용을 위한 차양 계수 개발

2				용역개요		‘

□ 용 역 명: 건축물 차양 종류별 효과 분석 및 계수 개발

****************************************

□ 용역기간: 착수일로부터 4개월

□ 계약방법: 수의계약

********************

○ 선정조건: 최저가 제시 업체

□ 주요 과업내용

가. 외부차양의 필요성 및 현황 조사

○ 건축물 에너지 절감을 위한 외부차양의 필요성

- 제로에너지 건축물을 실현하기 위한 패시브기법 중 외부 차양 장치의 필요성 조사

- 내부 차양과 외부 차양의 효과 차이 조사

○ 공급 가능한 외부 차양의 종류 조사

- 실제 적용 건축현장에서 수급 가능한 차양 종류 조사

□ 외부전동 블라인드, 고정차양(수평 및 수직), 전동 셔터, 어닝 천을 이용한 차양 등

○ 외부 차양의 효과에 대한 기존 문헌 조사

- 연구논문 등 외부차양에 대한 기존 연구성과 조사 및 요약

나. 외부차양 지표 선정을 위한 효과 및 계수 개발

○ 서울시 특성을 고려한 차양 효과 분석

- 서울의 위도 및 기후를 반영한 효과 분석

○ 서울시 녹색건축 설계기준 적용 검토를 위한 계수 개발

- 외부 차양의 유형별 일사에너지 차단 효과 분석

○ 결과도출

- 외부차양의 종류별 적용 계수 개발

3				행정사항		‘

***************************************

□ 예산과목: 주택건축본부 건축기획과, 아름답고 매력있는 도시건축조성 지원, 건축물 공공성 강화, 녹색건축 활성화사업 추진, 사무관리비

□ 집행방법: 용역 성과물 납품 후 수행업체에 일상경비로 지출

□ 집행근거

- 소모품의 매입·제조·운반, 소규모 용역 및 임차, 인쇄물의 경우에는 1건당 금액(부가세 포함된 금액)이 1천만원 이하로 한정.

※ 재무회계규칙 제13조(세출예산의 집행) 제2항.

4				향후일정		‘

□ ’19.6.: 용역수행사 선정 및 착수 보고

□ ’19.7.: 중간 보고

□ ’19.9.: 최종 보고 및 성과품 제출

붙임  1. 과업내용서 1부.

2. 산출내역서 1부.

3. 사업자등록증 사본 1부.  끝.