문서번호	방재시설부-8254
결재일자	2019.6.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
한승균		조성만	06/10 이임섭
협 조

서초역~방배로간 도로개설공사

시점부 보도경사 완화 시설물 설치 반영 검토 보고

2019. 6

도시기반시설본부

(방재시설부)

서초역~방배로간 도로개설공사

시점부 보도경사 완화 시설물 설치 반영 검토 보고

시점부 띠녹지 일부구간(14개소)에 대하여 인접건물과의 고저차를 완화하기 위해 보도경사 완화 시설물(플랜터)의 설치 반영하기 위한 검토 보고임

공사개요

○ 위    치 : 서초구 방배동 내방역 ~ 서초동 서초역(대법원 앞)

○ 규    모 : 도로개설 폭 40m(왕복 6~8차로), 연장 1.28㎞(터널 400m)

○ 공사기간 : '15.10. ~ '19. 6.

○ 도 급 비 : 49,948백만원

○ 시공사 / 사업관리 : 롯데건설(주) / ㈜제일엔지니어링 외2

보고내용

○ 시점부 보도경사 완화 시설물 설치 반영 위치 및 횡단면도

⇐ 내방역

서초역 ⇒

① ②   ③

④    ⑤⑥⑦

⑧

⑨      ⑩  ⑪ ⑫ ⑬  ⑭

STA.0＋290

STA.0＋060

당 초	변 경

○ 보도경사 완화 시설물(플랜터) 설치 검토

- 시점부 보도공사 구간 중 일부 띠녹지구간(14개소)은 인접건물과의 고저차로 인하여 보도 횡단경사 기준(2~4%)을 초과하여 보행자의 편의성 및 안전성 확보 필요(서울시 보도공사 설계시공 매뉴얼 반영)

- 시설물 상세도

정 면 도	단 면 도	시공사례

○ 주요 공사물량 증․감내역

구 분	규 격	단위	당 초	변 경	증․감(△)	비 고
부대공
플랜터 설치	본체블럭	m2	-	81	81
플랜터 설치	마감블럭	m	-	183	183

- 개략공사비 : 37백만원(증)

건설사업관리단 의견

○ 시점부 보도공사 구간 중 일부 띠녹지 구간(14개소)은 인접건물과의 고저차로 인하여 보도 횡단경사(2~4%)를 초과하므로 보행자 안전확보 및 민원 예방 등을 위하여 서울시의 보도공사 설계시공 매뉴얼에 의거 띠녹지 구간에 보도경사 완화 시설물(플랜터)을 설치 반영하는 것이 타당하며, 플랜터 설치 반영 공종의 수량 및 공사비 산정은 적정하다 판단됨.

보고자 의견

○ 건설사업관리단의 검토의견이 적정한 것으로 판단되며 공기에 변동이 없으므로 실정보고 사항을 승인처리하고 추후 설계변경시 계약내역에 반영하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.