문서번호	기전과-3342
결재일자	2019.6.10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		기전과장
김용문		06/10 임태수
협 조

『2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)』

제2차 작업지시 계획 보고

2019. 6.

남부도로사업소

(기 전 과)

『2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)』

제2차 작업지시 계획 보고

『2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)』관련 제2차 작업지시를 아래와 같이 시행하여 교통안전표지 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 교통안전표지 현황                              <2019년, T-gis자료>

구 분	합계	주의	규제	지시	보조	대형	기타
안전표지	12,807	955	4,503	2,727	3,842	23	757

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2019년 교통안전표지 설치 및 유지보수공사(연간단가)

○ 공사장소 : 남부도로사업소 관내(동작, 관악, 금천, 서초, 영등포 일부)

○ 공사내용 : 교통안전표지 신설(서울지방경찰청 규제) 및 일상 유지보수

○ 계 약 자 : ***************

- 계약기간 : 2019. 2. 22. ~ 2019. 12. 27.

- 계약금액 : ************

○ 감리업체 : ************

□ 그간의 추진사항

○ 2019.3.12 : 제1차 작업지시 - 13건

○ 2019.4.05 : 제1차 작업지시(추가1) - 21건

○ 2019.5.13 : 제1차 작업지시(추가2) - 6건

○ 2019.5.31 : 제1차 작업완료 보고(감리)

- 작업기간 : 2019. 3. 12 ~ 5. 31(금)

- 작업내용 및 결과 : 총 40건(규제 35건, 일상유지 5건)

▷ 규제사항 : 35건(완료 30건, 미완료 5건)

▷ 일상유지 : 5건(완료 5건, 미완료 0건)

※ 1차작업 미완료 5건에 대하여는 현장여건(신호기, 노면작업)이 조성되면 작업 실시토록 함

□ 금회 작업지시 사항

○ 작업지시 차수 : 제2차

○ 작업기간 : 2019.6.11. ∼ 2019.8.30.(금)

○ 작업대상 : 총 12건(규제 8건, 일상유지 4건)

<주요작업내용>

연번	위 치	작 업 내 용	작업근거	비고
1	관악구 신림동 산 137-7 (미림여고 북측교차로)	#224(속도40) -------- 1(신설)	교통운영과-8362 '19.5.14
2	서초구 잠수교남단 지하차도입구 (남⇒북방향)	지주 쓰러짐⇒지주 재설치---1식 (표지, 지주재사용)	민원
3	서초구 잠수교남단 (회전교차로 중앙측)	지주 쓰러짐⇒지주 재설치----1식 (표지 재사용)	민원
4	서초구 방배로47 (누리시아웨딩홀앞)	#214(좌회전금지) ------ 2(신설)	교통관리과-4109 2019-02-27
5	동작구 보라매로 70앞 (보라매e편한세상 앞)	#420(보조, 우방향) --- 1(신설)	교통관리과-6925 19.3.27
6	영등포구 도림동255-3 (신도림고가차도 교차로 앞)	#224(속도, 50) -------- 1(신설)	교통관리과-7045 2019-03-27
7	동작구 국립현충원 입구 (현충일행사대비)	#횡단보도표지 ------- 2(임시)	관악경찰서
8	영등포구 신길동 신길로108 (남서울아파트 앞)	#329(비보호) --------- 1(철거)	교통관리과-7045 2019-03-27
9	관악구 난곡로 33~6 주변 (난곡로)	#보조표지 ---------- 3(신설) <600*300,색상협의>	관악서교통과-5022 2019-6-03
10	동작구 동작대교 남단 (현충원 방향분기점)	#230(보행금지) ------ 1(이설) (이설, 철주신설)	용산서교통과-4876 2019-6-05

□ 검토의견

○ 교통안전표지 설치 및 유지보수 대상(규제 8건, 유지보수 4건)에 대하여  금회 제2차 작업지시 하여 신속히 설치코자 하며,

○ 1차작업 미완료 5건에 대하여는 현장여건(신호기 및 노면 작업)이 조성되면 공사실시 토록 하고,

○ 2차 작업 중 규제사항 및 일상유지보수 등 긴급사항 발생시 추가 작업지시로 신속히 처리하여 이용시민의 불편해소 및 교통안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

□ 행정사항

○ 제2차 작업지시 : 2019. 6. 10.

○ 제2차 작업기간 : 2019. 6. 11. ~ 8. 30일까지

※ 금회 작업기간 중 경찰청 규제사항 및 긴급사항 발생시 추가 작업지시로 신속히 조치코자 함.

붙 임 : 1. 제2차 작업지시 사항 1부.

2. 위치도 및 관련도면(별첨) 1부.  끝.