투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연장 요청(태양광발전설비)

1. 기전과-4440(2019.4.26.)호와 관련한 내용입니다.

2. 청사 태양광발전설비 설치공사 관련 관급자재(청사 태양광 발전설비) 납품기한

을 연장 요청하니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공사명: 관급자재(청사 태양광 발전설비) 구매

나. 계약자: 주식회사 풍성인더스

다. 납품요구번호: 12-19-2-21639-00

라. 구매내역

품 명	단위	단가	금액	수량
태양광발전장치(모니터링시스템)	식	4,950,000	4,950,000	1
태양광발전장치(35kw,고정형, 계통연계형)	식	98,059,500	196,119,000	2

마. 납품기한: 당초)2019. 6. 28. → 변경)2019. 8. 30.

바. 연장사유: 설계 검토결과 배전반 추가 제작이 필요하여, 사업진행이 지연되

어 이에 연계된 태양광발전장치 납품기한 연장.

첨부 방침서 1부.  끝.

	기전과장
주무관	정영술		기전과장	06/10 서수일
협조자
시행	기전과-6160	(		)	접수		(		)
우	03918	마포구 가양대로 203(상암동 835)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8403	/전송	02-300-8410	/		/	대시민공개