문서번호	행정운영과-7128
결재일자	2019.6.10.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
나동안		박희복	06/10 이상국
협 조
	기획예산과장			박재희
	재무회계과장			김분숙

청사 CCTV 교체 및 신규 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 06.

경영관리부

(행정운영과)

청사 CCTV 교체 및 신규 설치 계획

내구연한 경과로 노후된 청사 CCTV를 교체 또는 신규 설치하여 청사의 시설 보안 및 안전한 유지관리에 만전을 기하고자 함.

사업개요
❍ CCTV 교체 개요

구분	교체 전	교체 후	비고
설치년도	2005.5(16대), 2010.10(5대)	2019.8
카메라 규격	- 고정식 21대 - 40만 화소	- 고정식 23대(교체 21, 신규2) - 400만화소

❍ 카메라 교체(신규) 설치 위치

- 교체 : 21대, 신규 설치 : 2대

- 교체(신규) 위치(도면 별첨)

연번	설치장소 및 촬영범위	연번	설치장소 및 촬영범위
1	광장 분수대	13	서쪽 전산실
2	청사 진입로	14	본관 동쪽 진입로
3	광장 우림지	15	주차장 진입로
4	광장 등나무	16	주차장 통로
5	청사 서쪽 통로	17	주차장 중앙
6	청사 동쪽 출입문	18	별관 입구
7	통합정보센타	19	별관1층 엘레베이터
8	로비	20	별관 다목적실
9	본부장실 출입문	21	하늘정원 출입문
10	청사 서쪽 출입문	22	지하 1층 복도(신규)
11	동쪽 전산실	23	지하 1층 복도(신규)
12	전산실 출입구

교체 및 신규 설치 계획

❍ CCTV 설비 구성도

❍ 사업기간 : 2019.06. ~ 8.31

❍ 소요예산 : 75백만원

- 예산과목 : 기계장치, 서비스장비확충 및 환경개선, 시설비

❍ 구매·설치방법 : 조달청 제3자단가계약

- 선정업체 : 세운씨앤텍(주)
- 선정사유

· 조달청에 등록된 우수제품 3개사 비교 “ 붙임 1” 참조

· 유사성능 대비 저렴하고, 물품구매비 내 배관 및 배선비 포함

추진일정

❍ CCTV 설치 행정예고(의견청취) --------------------- ’19. 6.20.

※ 관련규정 : 개인정보보호법시행령 제23조

❍ 조달청 제3자단가 구매 발주 ------------------------- ’19. 7. 15

❍ 설치완료 및 물품 검사 ------------------------------ ’19. 8. 31.

붙임 : 1. 영상감시장치 성능 비교표. 1부.

2. CCTV 설치 위치도 5부.  끝.