문서번호	치수과-1930
결재일자	2019.6.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
권혁제		손창열	06/10 전영주
협 조	시설관리과장			한흥태
	기전설비과장			정임근
	기반시설과장			라철흠
	주무관			김경화
	주무관			최규석
	주무관			민영애
	주무관			한현철

한강내 하천시설 특별점검 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 6.

시설부 치수과

한강 내 하천시설 특별점검 계획 보고

헝가리 유람선 사고와 관련하여 우리부에서 관리하고 있는 하천시설에  대한 일제점검 및 정비를 통해 안전사고를 사전에 방지하고자 함.

※ 6.3 슈퍼데스크 논의 : 전문가 참여한 점검실시로 객관성 및 전문성 확보

점 검 개 요

○ 점검기간 : ‘19. 6. 10. ~ ’19. 6. 20

○ 점검대상 : 한강공원 내 시설부 관리시설 (붙임참조)

구 분	수 량	관리부서	비 고
계	155
나 들 목	56	치수과	지적사항은 시설물 관리부서에서 정비
제 방	2
도로교량	13	시설관리과	〃
수 중 보	2	기전설비과	〃
승 강 기	35
보도육교	13	기반시설과	〃
교량 접속시설	34

○ 점검방법 : 과별 점검 담당자와 외부전문가 합동 육안점검

- 치  수  과 (3개공원) : 광나루, 잠실, 잠원공원 점검

- 시설관리과 (3개공원) : 반포, 이촌, 여의도(샛강포함)공원 점검

- 기전설비과 (2개공원) : 뚝섬, 강서공원 점검 (수중보 포함)

- 기반시설과 (3개공원) : 양화, 망원, 난지공원 점검

○ 주요 점검내용

- 제방 및 나들목   : 토공부 침하 및 구조물 균열 등 손상 여부

- 도 로 교 량      : 교대, 교각, 상판 파손 및 난간 등 안전시설 상태

- 수중보 및 승강기 : 기계 작동상태 및 전기시설 누전 여부 등

- 육교 및 접속시설 : 강재시설 부식 및 도장탈락, 난간 등 안전시설 점검

세 부 추 진 계 획

○ 6. 10.~11. : 과별 담당공원 및 외부전문가 선정

- 11개 공원․과별로 지정된 담당자가 외부전문가 선정

･ 치  수  과 : 광나루 (조상원, 나병윤), 잠 실 (김동식, 김태규), 잠 원 ( 최규석, 이근호)

･ 시설관리과 : 반 포 (석기철, 김재건), 이 촌 (한상신, 이균휴), 여의도 ( 강성수, 신동민)

･ 기전설비과 : 뚝 섬 (심보현, 박주형), 강 서 (김재규, 한현철)

･ 기반시설과 : 양 화 (정창수, 박관호), 망 원 (김일문, 이건용), 난 지 (박지수, 임영준)

* 뚝섬 및 강서공원은 잠실, 신곡수중보 포함 점검

- 기 구성된 한강 안전관리자문단 및 시 건설기술심의위원 중에서 점검참여

가능여부 확인하여 공원별로 구조물 분야 및 기전분야 전문가 선정

* 한강 안전관리자문단 및 시 건설기술심의위원 중에서 외부전문가 우선 선정

하고, 위원의 사전일정 등으로 점검참여가 어려울 시 일반 전문가로 선정

- 시설물 및 기계･전기 분야 위주의 점검으로, 구조물 분야 1인, 기전분야 1인,

공원별로 외부전문가 2인로 선정 ( 광나루 공원은 구조물 분야 1인만 선정)

○ 6. 12. ~ 20. : 공원별로 외부전문가와 합동점검 시행

- 담당 공원 내 관리시설에 대해 외부전문가 2인(구조물 및 기전분야)과

공원별 담당직원이 합동으로 일제 안전점검 실시

- 공원별 점검 담당자는 점검 시행전 해당공원 안내센터 시설물 담당과 협의

하여 점검순서 및 전기차 등 이동수단 사용할 수 있도록 사전 조치

- 검검결과 긴급조치가 필요한 사항은 현장에서 관리부서로서 긴급 정비요청

○ 6. 21 ~  : 점검 결과 보고 및 지적사항 정비 실시

- 점검결과 정리 및 보고

․ 11개 공원별 점검 및 지적사항 수합 - 치수과

- 시설물 관리부서별로 점검 지적사항에 대한 정비 및 조치계획 수립

․ 경미한 사항은 연간단가업체 및 보수반에 작업지시

․ 중대한 손상은 응급조치 후 정비계획 수립하여 예산사업으로 시행

행 정 사 항

○ 하천시설 점검결과 제출

- 점검완료 후 점검담당자는 붙임양식에 따라 작성･날인하여 치수과로 송부

- 외부전문가 주소, 주민등록번호, 계좌번호 작성

○ 전문가 점검수당 지급 : 5,880천원

- 산출내역 : 엔지니어링 건설부분 특급기술자 노임 280천원 × 21인

･ 외부전문가 21인 : 광나루 공원 1인, 광나루 외 10개 공원 2인

- 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비

- 점검비 지출 : 치수과 서무가 수합하여 일괄 지출

붙 임 : 1. 공원별 점검대상 시설 1부.

2. 하천시설물 점검표 및  점검 착안사항 각 1부.

3. 한강 안전관리자문단 및 시 건설기술심의위원 명단 각 1부.   끝.