문서번호	방재시설부-8169
결재일자	2019.6.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
정영미		신용우	06/10 이임섭
협조

『구북부법조단지 환경개선공사』

조경식재 2차 실정사항 검토보고

2019. 6.

방재시설부

조경시설과

『구 북부법조단지 환경개선공사』

조경식재 2차 실정사항 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『구 북부법조단지 환경개선공사』조경식재 분야 실정사항에 대하여 검토 및 조치계획을 보고드림.

Ⅰ		공 사 개 요

▢ 공 사 명 : 구 북부법조단지 환경개선공사

▢ 위    치 : 노원구 동일로174길 27(공릉동 622)

▢ 규    모 : 지상15층, 지하1층, 연면적 6,785.96㎡

❍ 조경개요

- 조경면적 : 2,015.51㎡

- 식  재 : 교목(소나무 등 16종 256주), 관목(남천 등 16종 14,124주)

초화류(감국 등 20종 13,310본)

- 시설물 : 나무광장 플랜터 등 22종

- 포  장 : 벽돌포장 등 14종

▢ 공사기간 : 2018.03.21. ～ 2019.06.20.

▢ 공 사 비 : 42억원(조경 13억원)

▢ 시 공 사 : ㈜지앤지종합건설/강남조경건설(주),(주)도원도시

▢ 감 리 사 : ㈜경호엔지니어링

Ⅱ		검 토 사 항

▢ 주민 요구사항 및 현장여건 변경

❍ 서측 주택인접구간 수목식재요청 주민민원

❍ 현장여건 변경에 따른 관목 및 초화식재 물량변경 필요

Ⅲ		검토결과

▢ 주민 요구사항 및 현장 변경사항 반영

❍ 서측 주택인접구간 수목식재요청 주민민원 및 경관향상을 위한 플랜터 설치 및 식재반영

- 플랜터A(1000×1000×H800) 0개 → 5개소

- 플랜터B(1000×2000×H800) 0개 → 12개소

❍ 현장여건 변경으로 식재부적합지 관목 및 초화식재 물량변경 반영

- 눈향나무 등 13종 13,047주 → 눈향나무 등 13종 10,138주

- 감국 등 5종 6,880본  → 감국 등 5종 8,820본

- 잔디(0.3×0.3×0.3) 0 → 잔디(0.3×0.3×0.03) 252.02㎡

▢ 공사비 변경

공 종 명	당 초	변 경	증 감	비고
직접공사비	105,662,516	124,308,713	18,646,197
제경비	30,227,484	31,241,287	1,013,803
공급가액	135,890,000	155,550,000	19,660,000
부가가치세	13,589,000	15,555,000	1,966,000
도급공사비	149,479,000	171,105,000	21,626,000
총공사비	149,479,000	171,105,000	21,626,000

▢ 공사비 확보방안

❍ 조경공사(식재) 도급비 증액에 대하여는 본 공사 「구 북부법조단지 환경개선공사」 총공사비 설계변경에 반영

Ⅲ		보고자 의견

❍ 상기 검토사항에 대하여 승인처리하며 추후 설계 변경에 반영코자 함.

붙 임 : 감리 보고서 및 변경 도서 1부.  끝.