투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	(주) 태영알앤디
(경유)
제 목	실정보고 승인 및 설계변경 지시[2019년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기공사(발산역)-강서]

1. 기전과-5509(2019.06.07.)호 및 태영2019(신)-10(2019.05.09.)호와 관련

입니다.

2. 『2019년 중앙버스전용차로 흐름개선 교통신호기공사(발산역)-강서』실정보고에 따른 검토 결과 아래와 같이 승인통보하니 공사품질 확보에 만전을 기해 주시고, 설계변경에 관련 사항을 반영하시기 바랍니다.

가. 실정보고 승인 사항

1) 버스전용차로 포함 운전자 시인성 확보를 위한 차량등 수량조정 반영

2) 시각장애인용 음향신호기 및 압버튼(브라켓) 물량변경 반영

3) 차량지주 및 부착대 현장상황에 맞게 부착대 길이조정 및 디자인지주           규격변경 반영

4) 디자인지주 차량용 및 보행용 보호금구 물량변경 반영

5) 디자인 지주기초 및 앙카 규격 및 물량변경 반영

6) 지주 통합설치에 따른 신호케이블 규격 및 물량 변경 반영

7) 전원인입 구간 변경에 따른 물량조정 반영

8) 전선관 배관 현장상황에 맞게 규격 및 물량변경 반영

9) 기타 부대 공종 물량 증,감 반영

나. 설계변경 지시 사항

1) 실정보고 승인사항 반영(신규 공종 추가 등)

2) 공종별 물량 변동 사항 반영

3) 보험료 등 사후정산 항목 증빙서류 확인하여 정산

붙임  설계도면(변경전후) 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	진현주		기전과장	전결 06/07 서승완
협조자
시행	기전과-5510	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동) 강서도로사업소 기전과	/
전화	02-2657-7964	/전송	02-2657-7939	/		/	대시민공개