문서번호	민방위경보통제소-1669
결재일자	2019.6.11.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

담당자	경보운영팀장	민방위경보통제소장		서울종합방재센터소장
이강환	김성민	이방우		06/11 김학준
협 조
	경보상황팀장		유태식

- 2019년도 민방위경보 -

노후 위성수신기 교체 사업 완료 보고

2019. 6.

서울종합방재센터

(민방위경보통제소)

- 2019년도 민방위경보  -

노후 위성수신기 교체 사업 완료보고

2019년도 민방위경보 노후 위성수신기 교체사업을 완료하고

그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		사 업 개 요

□ 사 업 명 : 민방위경보 노후 위성수신기 교체

□ 계약기간 : 2019. 3. 25.~2019. 6. 23.(90일)

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰(적격심사)

□ 계 약 자 : 주식회사 나비시스템

□ 계약금액 : 금125,240,500원

□ 사업대상 : **************

Ⅱ		사업 추진경위

□ 추진계획 보고(방침)  : ’19. 1. 31.

□ 계약심사 및 사전공개 : ’19. 2. 21.

□ 계약의뢰             : ’19. 3. 6.

□ 계약체결 및 사업추진 : ’19. 3. 25. ~ ’19. 5. 28

□ 검사검수 요청        : ’19. 5. 29.

□ 검사(수)            : ’19. 6. 7.

Ⅲ		납 품 내 역

[단위 : 원(VAT포함) ]

품 명	규 격	단위	수량	단 가	계약금액
위성수신기	다중 위성채널 수신 및 경보발령	대	35	3,578,300	125,240,500

Ⅳ		설 치 현 황

번호	자치구	경보사이렌(위성수신기) 설치위치
1	강남구	****
2	강남구	**********
3	강동구	***********
4	강북구	*********
5	강북구	***
6	강서구	****
7	관악구	*********
8	광진구	*********
9	구로구	*********
10	구로구	****
11	금천구	***********
12	도봉구	*********
13	동대문	***
14	서대문	*********
15	서대문	*********
16	서초구	****
17	서초구	**********
18	서초구	**********
19	서초구	****
20	성동구	**********
21	성북구	**********
22	성북구	****
23	송파구	***********
24	송파구	**********
25	송파구	************
26	양천구	****
27	양천구	***
28	양천구	****
29	영등포	***********
30	영등포	**********
31	은평구	*********
32	은평구	************
33	종로구	********
34	중구	*******
35	중구	*********

Ⅴ		시험발령・검수 결과

□ 교체 대상 장비	: 노후 위성수신기 35대
□ 장비 교체 작업일	: ’19. 4. 22.(월) ~ 5. 3. (금)
□ 실제 장비운영 및 안정화	: ’19. 5. 4. (토) ~ 5. 28.(화)
□ 시험발령 및 검사(수)	: ’19. 6. 5. (수) ~ 6. 7. (금)
□ 검사(수) 및 장비운영 결과	: 정상

Ⅵ		사업 산출물

□ 장비납품 수량 및 설치내역서 2부

□ 설치완료 시험절차 및 성적서 2부

□ 경보발령(시험) 결과 자료 2부

□ 사진첩(파일) 2부

붙임   1. 노후 위성수신기 교체 품목내역서 1부.

2. 사진첩 1부.  끝.