＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	노후밸브 정비 철저 및 예산 신속집행 요청

1. 2019년도 노후밸브 정비사업 관련하여 정비실적 및 예산집행 현황을 아래와 같이 알려드리니 부진 사업소는 특단의 대책을 강구하여 정비실적 향상과 이에따른 예산 신속집행이(상반기 목표 : 56.5%) 될 수 있도록 조치 하시기 바랍니다.

2. 아울러 본 사업은 市 성과관리(BSC) 사업으로서 분기별, 연간 목표관리로 추진되고 있으니 목표 달성에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 정비실적/ 예산집행 실적 (기준일자 2019.5. 31.)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동	자재센터
정비목표(개소)	3,200	560	260	510	135	500	410	555	270	-
정비실적	812	71	22	280	57	61	42	157	122
정비율	25.4%	12.7%	8.5%	54.9%	42.2%	12.2%	10.2%	28.3%	45.2%	-
예산액(백만원)	26,280	4,266	2,093	3,122	1,213	3,752	3,130	3,866	1,826	3,012
집행액	3,783	539	346	601	311	554	364	261	165	642
집행률	15%	12.6%	16.5%	19.3%	25.6%	14.8%	11.6%	6.8%	9%	21.3%

나. 분기별 목표(정비)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
계	3,200	560	260	510	135	500	410	555	270
1 분기	0	-	-	-	-	-	-	-	-
2 분기	802	140	65	128	34	125	103	139	68
3 분기	1,121	196	91	179	47	175	144	194	95
4 분기	1,277	224	104	203	54	200	163	222	107

붙임 : 2019년 노후밸브 정비 추진계획 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수도사업소 급수운영과,시설관리과,수도자재관리센터소장
주무관	성기옥		시설관리과장	정윤홍		시설안전부장	06/11 이규상
협조자
시행	시설관리과-5911	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3146-1531	/전송	3146-1529	/	sapker85@seoul.go.kr	/	대시민공개