문서번호	도시철도설비부-5487
결재일자	2019.6.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		송변전과장	도시철도설비부장
김병훈		서태창	06/11 구자훈
협 조

도시철도 하남선(5호선연장) 차량기지 전차선공사

설계변경(총차2회,2차1회) 검토 보고

2019. 6

도시기반시설본부

[도시철도설비부]

도시철도 하남선(5호선연장) 차량기지 전차선공사

설계변경(총차2회,2차1회) 검토 보고

도시철도 하남선(5호선연장) 차량기지 전차선공사와 관련, 공사추진 중 현장여건 상이에 따른 시공물량 증감 및 효율적인 공정관리를 위한 설계변경(총차,2차) 검토 보고사항을 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

▢ 공 사 명 : 도시철도 하남선(5호선 연장) 차량기지 전차선공사

▢ 공사내용

- 전차선 및 조가선 신설․조정․철거 12.8km, 급전선 및 케이블 신설․조정․철거 등

▢ 계약업체 : ㈜태광전력외 1개업체

▢ 계약사항

구분	총 차	2차	비고
공사기간	*********************	*********************
계약금액	***************	*************

Ⅱ		추진경위

▢ `19. 5. 20. : 하남선 차량기지 전차선공사 실정보고

▢ `19. 5. 21. : 실정보고 조건부 승인 통보(본부→감리단)

▢ `19. 5. 27. : 설계변경 자문요청 및 계약내역 변경요청(감리단→본부)

▢ `19. 5. 31. : 설계변경 자문(소)위원회 개최

Ⅲ		설계변경 내용

■ 총차(2회) 설계변경

▢ 물량 증감 내용

구 분	단위	당 초	변 경	증 감	비 고
V형 트러스라멘빔 신설	EA	**	**	****
가동브래킷 신설	EA	**	**	****
곡선당김장치 신설	EA	**	**	****
전차선 및 조가선 신설	m	*****	*****	****
구분장치 신설	개소	*	*	****
FEED LINE FRAME 신설	EA	**	**	****
ANGLE(완철) 신설	EA	**	**	****
급전분기장치 신설	개소	**	**	****
급전선 신설	m	*****	*****	****
급전선 부속설비 신설,철거	개소	**	**	****
전력케이블 신설,조정철거	m	*****	*****	****
기타설비	식	*	*	*

*******************************************

******************************************************************************************************

*************************************************************************************************************************************

*************************************************************************************

▢ 공종별 증감내역                                    [단위:원]

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
V형 트러스라멘빔 신설	**********	**********	**********
가동브래킷 신설	***********	**********	**********
곡선당김장치 신설	**********	**********	*********
전차선 및 조가선 신설	***********	***********	*********
구분장치 신설	**********	**********	*********
FEED LINE FRAME 신설	**********	**********	*********
ANGLE(완철) 신설	**********	**********	*******
급전분기장치 신설	**********	**********	**********
급전선 신설	**********	**********	**********
급전선 부속설비 신설,철거	**********	**********	**********
전력케이블 신설,조정철거	***********	***********	*********
기타설비	***********	***********	*********
금액합계	*************	*************	**********

▢ 설계변경 금액

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
재료비	************	*************	************
노무비	************	*************	************
경비	************	*************	************
순공사비	*************	*************	************
일반관리비	*************	*************	************
이윤	*************	*************	************
PS(가설사무소 등)	*************	************	************
도급원가	*************	*************	************

■ 2차(1회) 설계변경

▢ 물량 증감 내용

구 분	단위	당 초	변 경	증 감	비 고
지선 신설	개소	**	*	******
지선기초 신설	개소	**	**	******
H형강주기초 신설	개소	**	**	******
H형강주 신설	개소	**	**	******
V형 트러스라멘빔 신설	개소	*	*	******
지지물 철거	개소	**	**	*
가동브래킷 신설	EA	**	**	******
곡선당김장치 신설	EA	**	**	******
하수강 신설	EA	**	**	******
전차선 신설	m	*****	***	******
조가선 신설	m	*****	***	******
FEED LINE FRAME 신설(1선용)	EA	**	**	******
FEED LINE FRAME 신설(2선용)	EA	*	*	******
ANGLE(완철) 신설	EA	**	**	******
급전분기 신설	개소	*	**	******
급전선 신설	m	***	***	******
부급전선 접속함 신설	개소	*	*	******
급전선 인류	개소	*	*	******
급전선 접속	개소	*	*	******
6/10kV 난연케이블 신설	m	*****	***	******
0.6/1kV 전력케이블 신설	m	***	***	******
6/10kV 난연케이블 철거	m	***	***	******
피뢰기 신설	개소	*	*	******

***************************************************

▢ 공사비 증감내역

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
재료비	***********	***********	***********
노무비	***********	***********	***********
제경비	***********	***********	***********
도급원가	***********	***********	*

Ⅳ		검토사항

**********

***************************************************************************************************

***********************************************************************

**********

*************************************************

Ⅴ		향후계획

■ 총차 및 2차계약에 대한 설계변경 시행 및 계약 의뢰

붙임 : 1. 설계변경 검토서(감리단) 1부.

2. 설계변경(총차,2차) 도서 각1부.

3. 설계변경 자문(소)위원회 결과 1부.

4. 합의서 1부.  끝.