투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	구 북부법조단지 환경개선공사 관급자재 감 원인행위 요청

1. 우리 본부에서 시행한 『구 북부법조단지 환경개선공사』 관급자재변경구매 등에 따른 감원인행위를 아래와 같이 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 감 원인행위 요청내용

품의번호	품명	규격	원인행위액		비고
			당초	변경
73	석재타일 및 판석	t150	55,154,500	43,442,270	감 11,712,230
	석재타일 및 판석	t80
	석재타일 및 판석	t100
	석재블록	150*150*1000	2,831,090	2,831,090	기지출완료
	콘크리트블록	t80	98,539,130	98,539,130	-
	콘크리트블록	t60	11,215,460	4,976,320	감 6,239,140
	세라믹벽돌	190*90*57	75,776,540	49,429,590	감 26,346,950
	콘크리트블록	250*250*80	1,965,820	1,965,820	-
	옥외용벤치	1500*570*900	951,100	6,182,200	증 5,231,100
	자전거보관대	170*80*700	6,216,380	6,216,380	-
	계		252,650,020	213,582,800	감 39,067,220

나. 요청사유: 현장여건에 따른 물량 변경

다. 예산과목: 박물관 및 미술관 활성화, 박물관 및 미술관 건립지원, (구)북부법조단지 환경개선사업, 시설비및부대비, 시설비.

붙임  분할납품요구및통지 변경전,변경후 각1부.  끝.

	방재시설부장
주무관	정영미		조경시설과장	신용우		방재시설부장	06/11 이임섭
협조자
시행	방재시설부-8345	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 14층 (무교동)	/
전화	3708 - 8796	/전송	3708 - 8756	/	young306@seoul.go.kr	/	대시민공개