문서번호	건축부-9900
결재일자	2019.6.11.
공개여부	부분공개(6 7)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
정호기		조영수	06/11 임인구
협조

『마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사』

건설폐기물처리용역 2차계약 검토보고

2019. 06.

도시기반시설본부

건 축 부

『마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사』

건설폐기물처리용역 2차계약 검토보고

『마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사 건설폐기물처리용역』과 관련하여 건설사업관리단의 2차 계약시행 요청이 접수되어 이에 대하여 검토 보고함.

Ⅰ		용 역 개 요

○ 용 역 명 : 마곡산업단지 공공산업지원시설건립공사 건설폐기물처리용역

○ 위    치 : 강서구 마곡동 771-1(D28-2)

○ 용 역 사 : (주)화이트대흥(건설폐기물 수집운반업체)

(주)구성환경(건설폐기물 중간처리업체)

○ 용역기간 : (총차) 2019.03.11. ~ 2021.08.26.

(1차) 2019.03.11. ~ 2020.03.09.

○ 용역금액 : *********************************

Ⅱ		추 진 경 위

○ ’18. 08. 01 : 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사 착공

○ ’19. 03. 11 : 건설폐기물처리용역 착수

○ ’19. 06. 04 : 건설폐기물처리용역 2차계약 요청 검토보고

(토희마CM -174호(2019. 6. 4)

Ⅲ		실정보고 내용

○ 관련근거

- 건설폐기물의 재활용촉진에관한 법률 제15조 및 동법 시행령 제11조

- 건설폐기물처리용역 2차계약 요청 검토보고(토희마 CM-174:2019.6.4)

○ 2차계약 요청 사유

- 총차 및 1차 계약 금액 및 기간 : 변동 없음

- 2차 계약 시행: 건축공종 진행에 따른 건설폐기물 처리용역 총차분 중 일부 계약요청

○ 계약금액 변경                                      (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경(시행)	증·감
계약금액	총차	**********	**********	****
	1차	**********	**********	****
	2차(예정)	*	**********	****
계약기간	총차	2019.03.11. ~ 2021.08.26.	2019.03.11. ~ 2021.08.26..	변동없음
	1차	2019.03.11. ~ 2020.03.09.	2019.03.11. ~ 2020.03.09.	변동없음
	2차(예정)	-	2019.06. ~ 2020.10.31.	계약요청

Ⅳ		건설사업관리자 검토의견

○ 현장여건 반영에 따른 건설폐기물 처리용역 총차분 중 일부계약  요청으로, 2차 계약내역 물량 및 기간 적합하게 작성되었음.

Ⅴ		처 리 의 견

○ 검토 결과 관련규정 및 현장 여건에 적합한 것으로 판단되어 건설사업관리자의 의견에 따라 건설폐기물처리용역 2차계약을 시행하고자 함

붙임 : 건설폐기물처리용역 2차수 계약 요청 1부.  끝.