문서번호	교통운영과-10077
결재일자	2019.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통안전팀장	교통운영과장
손태빈		김세교	06/12 강진동
협조

19년 교통사고 잦은 곳 개선사업 예산

재배정 변경 보고(1,2차)

2019. 6.

2019년 교통사고 잦은 곳 개선사업 예산 재배정 변경보고

『교통사고 사망자 절반 줄이기 시책』의 일환으로 추진중인 교통사고 잦은 곳 개선사업을 시행하기 위한 예산을 재배정 하였으나 예산 변경 사항이 발생하여 이에 대한 조치 계획 보고임

□ 관련근거

○ 교통운영과-8981(‘19.5.22)

- 19년 교통사고 잦은 곳 개선사업 예산 재배정 계획(1차)

○ 교통운영과-9480(‘19.5.31)

- 19년 교통사고 잦은 곳 개선사업 예산 재배정 계획(2차)

□ 문 제 점

○ 교통사고 잦은 곳 개선사업을 위하여 예산을 재배정하였으나 아래와 같은 사유로 사업부서에서 사업 시행에 따른 예산 조정이 필요한 상황임

- 굴착통제로 인하여 19년 사업 불가 : 도곡1동사무소 입구

- 기존 시설물 이설비용 추가 : 현대아파트앞 교차로 등 2개소

- 시설물 추가 설치 및 변경에 따른 예산 조정 : 관세청 입구 등 14개소

○ 예산 변경 내역

대상지점	소요예산(당초)	소요예산(변경)	잔액
도곡1동사무소 입구 등 17개소	2,269,509천원	2,142,832천원	126,677천원

□ 조치계획

○ 굴착통제로 인하여 사업이 불가한 지점은 2020년 사업 시행 검토

○ 2019년 개선사업 예산 변경 사항은 사업시행 부서에 통보하여 사업 추진에 만전을 기하고

○ 잔액 126,677천원은 3차 재배정 예산으로 활용

□ 예산과목(교통사업특별회계)

○ 도시교통체계 및 소통개선, 교통소통 및 안전관리강화, 교통사고 잦은 곳 개선, 시설비 및 부대비, 시설비(202-401-01)

붙 임 : 예산 재배정 변경 내역(지점별,부서별).  끝.