문서번호	급수운영과-10894
결재일자	2019.6.12.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
김태승	류태현	06/12 이성환
협 조

설계변경 검토보고

(가산동 139-8~146-61번지 송배수관 정비공사)

2019. 06. 11. (화)

남부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 검토보고

(가산동 139-8~146-61번지 송배수관 정비공사)

「가산동 139-8~146-61번지 송배수관 정비공사」 업무수행 중 현장 시공여건 변화에 따른 신규공종 및 물량 증 ․ 감이 발생됨에 따라 설계변경을 시행하여 공사업무에 만전을 기하고자 함.

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 가산동 139-8~146-61번지 송배수관 정비공사

○ 계약기간 : 2019. 3. 18. ~ 2019. 06. 14.

○ 계 약 자 : *************

○ 계약금액 : *************

○ 공사개요 : D=900㎜, L=390m

□ 설계변경 근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

- 설계변경으로 인한 계약금액 조정

○ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제39호)

- 제13장 공사계약 일반조건 “6(공사설계의변경)-1(설계변경)-다”의 규정

□ 설계변경 사유

○ 공사 시행중 현장 시공여건 변화 및 상수도 공사의 특수성으로

신규공종, 자재 및 물량변동(증 ․ 감) 발생

- 신규공종 : 「파쇄물기계상차(집하장)」외 29개 공종

- 신규자재 : 「플랜지접합부속(고무링,볼트) D200mm)」외 5개 공종

○ 주요 설계변경 사유

- 관로 부설 연장 감소 외 1건/ 「급수운영과-9305(19.5.20.)」

- 횡단굴착 개소 증가 외 1건/ 「급수운영과-10182(19.5.31.)」

- 하수도 복구 외 2건/ 「급수운영과-10190(19.5.31.)」

- 굴착 폭 및 심도 증가건/ 「급수운영과-10257(19.6.03.)」

□ 설계변경 현황

○ 계약금액 변경

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	***********	***********	**********
부가가치세	**********	**********	*********
도 급 비	***********	***********	**********	증 6.8%

○ 공사개요 변경

구 분	당 초	변 경	비고
공사개요	D=900㎜, L=390m	D=900㎜, L=345m	감 45m

○ 주요 신규공종, 자재 및 물량 증 ․ 감 내역

공 종 (자재)	규 격	수 량			변동금액(원)
		단위	당초	변경
주입구 설치	D50mm	개소	신규	4	증 414,808
맹판 설치	D900mm	개소	신규	4	증 5,697,324
하수도복구공	흄관 800~1000mm(재사용) 야간	m	신규	12	증 1,402,308
싸인보드카	싸인보드 탑차용	HR	신규	192	증 6,465,984
철거자재운반	4.5DT(현장->집하장), 야간	톤	신규	37.03	증 444,878
기존관폐쇄충진	경량기포콘크리트(압송충진)	㎥	신규	77	증 21,640,388
기계 기구설치 및 철거	20㎥당 1회	회	신규	4	증 1,339,248

파쇄물기계상차(집하장)	유압식백호우 0.7㎥	㎥	신규	266	증 72,6446
보조기층공	T=40cm, 10㎠이상, 야간	a	신규	1.46	증 909,639
주철직관 부설공	200mm(야간)	m	신규	9	증 100,161
주철직관 부설공	300mm(야간)	m	신규	2	증 28,764
주철(이형관) 부설공	200mm(야간)	개소	신규	21	증 1,402,569
주철(이형관) 부설공	400mm(야간)	개소	신규	1	증 130,276
강관 절단공	600mm(야간)	m	신규	4	증 627,652
강이형관 부설공	600mm(야간)	개소	신규	3	증 903,075
강관 접합공	600mm(야간)	개소	신규	3	증 412,620
강관 도장공	600mm(야간)	개소	신규	2	증 252,938
K.P 죠인트관 접합공	300mm(야간)	개소	신규	4	증 197,868
K.P 이탈방지압륜 접합	200mm(야간)	개소	신규	24	증 878,352
주철관 절단공(절단기사용)	200mm(야간)	개소	신규	10	증 599,190
플랜지접합공	200mm(야간)	개소	신규	3	증 131,277
플랜지접합공	400mm(야간)	개소	신규	1	증 69,922
플랜지철거공	200mm(야간)	개소	신규	1	증 21,878
제수밸브 부설 및 접합공	200mm(야간)	개소	신규	1	증 121,214
절단면 녹막이페인트칠	200mm(야간), 스프레이3회	개소	신규	10	증 87,920
원형밸브실 설치공 (기초재활용플라스틱)	D=200mm(야간), 공기밸브1	개소	신규	1	증 487,020
원형밸브실 설치공 (기초재활용플라스틱)	D=200mm(야간), 공기밸브2	개소	신규	1	증 460,656
원형밸브실 설치공 (기초재활용플라스틱)	D=200mm(야간)	개소	신규	1	증 520,200
원형밸브실 설치공 (기초재활용플라스틱)	D=30mm(야간), 퇴수변	개소	신규	1	증 589,349
배치플랜트 설치 및 철거	60㎥당 1회	회	신규	2	증 503,918

○ 주요공종 수량 변경내용

공 종	구분	규 격	단 위	당 초	변 경	증․감
주철직관 부설	야간	D200~900㎜	m	390	345	감) 45
원형밸브실설치공	야간	D200~300㎜	개소	4	4	ㅡ
폐관 충진	야간	D900mm	㎡	0	77	증) 77
잔토 처리	야간	집하장->매립지	㎡	1,845	3,028	증) 1,183

□ 조치계획

○ 상기와 같은 설계변경 내역에 대하여 설계변경 심의위원회를 개최하여

심의 결과에 따라 설계변경을 시행코자 합니다.

붙임  1. 설계변경 검토보고(공단) 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 계약조정검증 확인증 1부.

4. 보험료정산 증명서 1부.  끝.