투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(실정보고 승인 알림, 시민생활사박물관리모델링 기계공사-자동제어시스템))

1.업무지시현장 : 시민생활사 박물관 리모델링(증축) 기계공사(장기-1차) 주식회사 경호

엔지니어링종합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2019-06-12 09:06:45

3.지 시 내 용

가. 시생박(건설관리)제838호(2019.6.11.)와 관련입니다.

나. 위 호와 관련하여 설계 오류에 의한 인버터제어반 중복 산정된 건으로 귀 책임건설사업관리기술자 실정보고건에 대하여 검토한바 적정하여 승인하오니, 추후 설계변경시 보고하여 주시기 바랍니다.

○ 실정보고 승인 현황

공종별	검토내용	검토결과
자동제어시스템	인버터 제어반이 관급장비(냉온수펌프,인버터 일체형)에 포함되어 삭제	-변경물량 : 인버터 제어반 1SET→0SET -변경금액 : -9,770,930원

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							이강욱			건축설비과장					06/12 김은덕
협조자
시행			설비부-8632									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시중구 청계천로8(무교동96번지)프리미어플레이스 빌딩 15층 108-1															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8627						/전송			02-3708-8659					/	24326@seoul.go.kr												/	대시민공개