＂상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!＂
	남부수도사업소
수신자	행정지원과장
(경유)
제 목	설계변경 계약의뢰(가산동 139-8~146-61번지 송배수관 정비공사)

우리사업소에서 시행중인 『가산동 139-8~146-61번지 송배수관 정비공사』에 대하여 설계변경 심의를 마치고 아래와 같이 설계변경 계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 가산동 139-8~146-61번지 송배수관 정비공사

나. 계 약 자 : ************

다. 공사기간 : 2019. 3. 18. ~ 2019. 06. 14.

라. 공사개요 : D=900mm, L=390m

마. 설계변경 내역

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고
	당 초	변 경
공급가액	***********	***********	**********
부가가치세	**********	**********	*********
도 급 비	***********	***********	**********	증 6.8 %

바. 설계변경 사유 : 현장 시공여건 변화로 인한 신규공종 및 공종별 물량 증,감

도종변경으로 인한 토공량, 폐기물 처리량 변경, 공사구간제외 등

사. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비 및 부대비,시설비(노후배급수관정비)

붙임  1. 설계변경검토보고서(공단,사업소) 및 심의결과보고

2. 설계변경내역서 1부.

3. 설계변경 심의의결서 및 합의서 1부.

4. 검증확인서 및 보험료정산내역서 1부.

5. 설계변경 시행문 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	김태승		주무관	류태현		급수운영과장	06/12 代서규석
협조자
시행	급수운영과-10982	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	02-3146-1565	/전송	02-3146-4589	/		/	부분공개(7)