문서번호	정수시설과-1956
결재일자	2019.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
임근식		백상희	06/12 서대훈
협 조
	주무관			김금옥

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!”

[침전지 슬러지수집기 개량공사]

설계변경 시행 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2019. 06.

강북아리수정수센터

[침전지 슬러지수집기 개량 공사]

설계변경 시행 보고

침전지 슬러지수집기 개량공사가 완료되어 아래와 같이 정산하고 설계변경 시행하고자 함.

Ⅰ		사 업 현 황

□ 사업개요

◯ 사 업 명 : 침전지 슬러지수집기 개량공사

◯ 사업기간 : 2019. 3. 13 ~ 2019. 9. 08

◯ 계약금액 : 금253,053,000원

◯ 계 약 자 : 근영이앤씨(주) 대표 박근준

◯ 계약 내역

- 와이어 로프 교체(∅20)×1,440m

- 대차바퀴 및 이탈방지장치 부품교체 48조

- 각종 쉬브 부품교체 36조, 기타 부대설비 보수 6조

Ⅱ		설계변경 사항

□ 총괄변경 내용

○ 계약금액 변경내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
공급가액	230,048,182	229,272,973	감)775,209
부가가치세	23,004,818	22,927,297	감)77,521
도급금액	253,053,000	252,200,270	감)852,730
결정금액	253,053,000	252,200,270	감)852,730

□ 세부 공사비 증감

구 분		당 초	변 경	증․감
순공사원가	재료비	119,043,336	122,787,483	증)3,744,147
	노무비	64,530,495	65,070,447	증)539,952
	경 비	24,999,596	20,762,535	감)4,237,061
	소 계	208,573,427	208,620,465	증)47,030
일반관리비		12,514,405	12,517,227	증)2,822
이 윤		13,583,285	13,091,536	감)491,749
고재처리		-4,622,935	-4,956,255	감)333,320
총원가		230,048,182	229,272,973	감)775,209
부가세		23,004,818	22,927,267	감)77,521
도급비		253,053,000	252,200,240	감)852,730

□ 주요 변경 내역

연번	변경사항	당초	변경	증․감
○ 공사 물량 증가
1	TAKE-UP SHEAVE, 샤프트, 베어링 물량 증가(12개→15개)	14,976,588	18,720,735	증)3,744,147
2	부속품 기기설치, 철거 물량 증가 (4.776톤→4.909톤)	18,020,051	18,520,469	증)500,418
3	고재처리 물량 증가 (4.075톤→4.207톤)	4,433,557	4,577,499	감)143,942
○ 제경비 감액
4	산업안전보건관리비 실 사용액 정산	6,331,687	1,859,000	감)4,472,687
계				감)377,064

- 물량 증가 사유 : 당초 물량 포함되지 않은 4-3지, 5지의 TAKE       -UP SHEAVE, 샤프트, 베어링이 수리가 필요해 물량 포함(기        보고, 정수시설과-1393(2019.4.22.))

Ⅲ		조치계획

□ 상기 변경 내용에 대해 자체 설계변경 심의위원회를 개최코자  하며, 심의결과에 따라 설계변경 시행하고자 함.

붙   임 : 1. 설계변경내역서(안)  1부.

2. 계약금액 조정 검증확인서(기술심사담당관)  1부.

3. 산업안전관리비 사용내역  1부.

4. 보험료 정산 서류  1부.

5. 산업안전관리비검토결과서  1부.  끝.