“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	(주)나우동인건축 컨소시엄(삼우건축, NBBJ)
(경유)
제목	잠실종합운동장 주경기장 리모델링 설계용역 계약체결 안내

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시에서 추진 중인 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 사업과 관련하여 국제설계공모에 당선한 귀사와 아래와 같이 설계용역 계약을 체결하고자   하오니 붙임 서류를 작성하시어 조속히 제출하시기 바랍니다.

3. 아울러, 효율적인 사업추진을 위하여 공모지침으로 공간계획을 수립 제시한 학생체육관 이전신축 사업의 설계를 본 설계용역 과업에 추가할 예정이므로, 설계공모지침서 대비 설계비 및 과업내용이 변경(증가) 됨을 알려드립니다.

가. 계약건명 : 잠실종합운동장 주경기장 리모델링 설계용역

나. 계약(예정)업체 : ㈜나우동인건축 컨소시엄(삼우건축, NBBJ)

다. 용역(예정)기간 : 계약일로부터 24개월

라. 설계용역 과업변경(계약금액, 과업내용)

구 분	당 초(설계공모지침서)	변 경(설계용역 과업추가)	증 감
설 계 비	금12,300,000,000원	금14,400,000,000원	(증) 21억
과업내용	연면적: 198.057㎡, 공사비: 2,530억원 주용도: 주·보조경기장, 유스호스텔, 문화·업무·판매 등 복합용도시설	연면적: 224,435㎡, 공사비: 3,126억원 주용도: 주·보조경기장, 유스호스텔, 문화·업무·판매 등 복합용도시설, 학생체육관	(증) 26,378㎡, (증) 569억 (증) 학생체육관

붙임 : 1. 과업내용서 1부.

2. 합의각서 1부.

3. 설계용역계약 일반조건 1부.

4. 설계용역계약 특수조건 1부.

5. 공동수급표준협정서(양식) 1부.    끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김남식		공공사업팀장	장충근		동남권사업과장	06/12 김창환
협조자	주무관	현승주
시행	동남권사업과-5803	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 5층 (무교동)	/
전화	02-2133-8236	/전송		/		/	부분공개(5)