투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사)

1. 기반시설과-1566(2019. 6. 3.)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 추진 중인「가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사」의 준공기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약현황

1) 공 사 명 : 가양대교 남단 외 2개소 승강기 설치공사

2) 계약기간

- 총  차 : 2018. 12. 20. ~ 2019. 12. 25.

- 1   차 : 2018. 12. 20. ~ 2019.  6. 30.

3) 도 급 액

- 총  차 : 금1,831,862,000원

- 1   차 : 금1,588,334,000원

4) 계약상대자

- 주계약자 : 이화종합건설(주) 대표 우경식

- 부계약자 : (주)신 영 토 건 대표 이용완

나. 준공기한 연기

- 총  차 : 변경없음

- 1   차 : 당초 2019.  6. 30 → 변경 2019. 9. 30

다. 귀책소재 : 한강사업본부

라. 지체상금 부과여부 : 미부과

마. 연기사유 : 설계 오류 정정에 따른 절대공기 부족(계약금액 변동없음)

붙임  1. 관련 보고서 1부

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.  끝.

	기반시설과장
주무관	박지수		기반시설과장	06/13 라철흠
협조자
시행	기반시설과-1700	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화		/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개