문서번호	서울특별시아동복지센터-7566
결재일자	2019.6.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
사업지원팀장		아동복지센터소장
김경래		06/13 代이부열
협 조
	서무팀장		이부열

구내식당 옥상 방수 공사

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
아동복지센터-7486(‘19.6.11)	-	-	-	16,360천원

2019. 06.

서울특별시아동복지센터

구내식당 옥상 방수 공사

구내식당 옥상이 우레탄 및 콘크리트가 들떠서 비가 샐 우려가 있어 이를 예방하기 위해 선제적 조치를 취하여 아동보호에 만전을 기하고자 함

□ 시설현황

○ 위    치 : 서울 강남구 광평로 34길 124

○ 규    모 : 대지 25,808㎡(7,807평), 건물 2,307㎡(698평)

○ 현황사진

구내식당 옥상 현황

□ 추진배경

○ 옥상의 표면이 풍화작용 등에 의해 콘크리트 및 우레탄이 들고 일어나 들떠있고 갈라져 비가 샐우려 높음

○ 아울러, 비가 샐 경우 아동 및 직원들 식사에 지장이 초래될 것으로 예상되어 선제적 조치 필요

□ 추진계획

○ 건    명 : 구내식당 옥상 방수 공사

○ 공사기간 : ‘19.06.17～07.16

○ 추진내용 : 구내 식당 옥상 콘크리트 타설 및 우레탄 방수 공사

- 세부내역 “과업 지시서” 참조

○ 소요예산

- 산출금액 : 금16,360,000원(금일천육백삼십육만원)

※ 계약금액은 계약상대자와 협의 조정

- 예산과목 : 아동복지센터 운영, 아동복지센터 운영 및 아동보호전문기관 확대(시비), 시설비 및 부대비, 시설비(401-01)

○ 계약방법 : 수의계약(소액)

- 추진근거

․ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 나목

․ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정자치부 예규 제40호) 제5장 수의계약 운영요령

※ 2천만원 이하 수의계약(1인 견적 가능, 지정정보처리장치에 의하지 않음)

○ 계약내용

- 계약 상대자

․ 상    호 : ㈜우린코퍼레이션(대표 권호진)

․ 소 재 지 : 경기도 하남시 춘궁로54번길 11(하사창동)

․ 전    화 : 031)793-4940, 핸드폰 *************

- 용역기간 : 착공일로부터 30일 이내

․ 계약일자(예정) ‘19.06.14.(목), 착공일(예정) ‘19.06.17.(월)

- 준공기한 : ‘19.07.16.(화)

□ 추진일정

○ ‘19.06.14 : 계약

○ ‘19.06.17~07.16 : 공사착공 및 준공

○ ‘19.07.17~24 : 준공처리 및 공사대금 지급

붙 임 : 1. 과업 지시서 1부,

2. 수의계약 요청 사유서 1부,

3. 청렴 이행 서약서 1부,

4. 산출기초 조사서 1부,

5. 견적서 2부.  끝.