문서번호	자연생태과-10559
결재일자	2019.6.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태복원팀장	자연생태과장
강현희		박경옥	06/13 하재호
협조

양재고개녹지연결로 조성 진행현황 보고

2019. 6

푸른도시국

(자연생태과)

양재고개녹지연결로 조성 진행현황 보고

‘17년 6월 국제공모후 기본 및 실시설계중에 있는 양재고개녹지연결로 조성사업에 대해 그간 진행사항 등을 아래와 같이 보고드림.

1		추진근거

○ 서울시 공원녹지의 효과적인 연결계획(2004. 2)

○ 2030 서울시 공원녹지 기본계획(2015. 7)

2		사업개요/현황

○ 위    치 : 서초구 서초동 산30-18일대(양재고개)

○ 규    모 : L100 × B10m

○ 사업내용 : 녹지연결로(우면산~말죽거리근린공원) 조성 등

○ 사업기간 : 2015 ~ 2020년

○ 사 업 비 : 15,044백만원(설계비 760, 보상비 1,601, 공사비 11,675, 감리 982, 기타26)

- 기투자  750백만원, ’19년 : 3,094백만원, 향후 11,190백만원

3		추진경위

○ 2014.12 : 의원발의 요구사업(이숙자 의원)

○ 2015. 4.24 ~ 2016.10.30 : 기본계획용역(서초구청)

《기본구상도》

평면도	종단면도	단면도

○ 2015. 9.23 : 서울시 투자심사 본위원회 심의(2단계 조건부 추진)

- 전문가 의견 청취, 공감대 형성을 위한 서울시민을 상대로 공청회 등 개최

- 기본설계시 안전성 및 경관을 충분히 검토하여 실시하고 예산은 기본설계부분까지만 반영, 그 이후 추진여부는 조건이행 결과를 통하여 2단계 심사시 결정

○ 2015.11.3/2016.1.13/ 2016.6.20: 전문가 자문회의(3회)

- 경부고속도로 지하화와 연계한 검토 및 규모축소, 심플한 디자인 등 의견 제시

○ 2016. 8.31 : 시민공감대 형성을 위한 시민공청회 개최

- 사업규모 축소(B15→B10m)시행 ⇨ 공사비 약50억 절감 기대

※ 공사비 : 17,123백만원 → 11,675백만원

- 시장(메모보고 의견) ⇨ 100억이 넘는 큰 공사로 조금 시간을 두고 검토

- 행정2부시장 ⇨ 현상공모 후 설계시행

○ 2017. 4. 14 : 설계공모 (도시공간개선단)

- 당선작 선정(2017. 6. 21) : Ivane Ksnelashvili, 리투아니아

○ 2017. 10. 17 ~ 2019. 6. 30 : 기본 및 실시설계(도시기반시설본부)

○ ***********************************

- 교량의 구조적 안정성에 대한 충분한 검토 및 경부고속도로 지하화사업

추진 고려 등 실시설계 완료 전 2단계 심사 의뢰

○ 2018. 3. 13 : 총괄건축가 자문(교량안전성을 위한 구조변경)

○ *****************************

- 녹지연결로 설치 후 이용자수 예측 등 사업추진의 타당성에 대한 보완필요

- 경부고속도로에서 보이는 경관 시뮬레이션 및 종단면도등 자료를 보완한 후 현장조사 소위원회를 구성하여 현장확인 후 재심의

○ 2018. 4. 25 : 교량구조 전문가 등 자문(푸른도시국 주관)

○ 2018. 8. 24 : 건설기술심의 (재심의)

- 비대칭 단면 및 상이한 교대부의 형식이 일반적이지 않는 구조물로 안정성확보가 어려울 것으로 판단

- 사계절 온도변화에 의한 물리적인 신축량이 강교에 구조적으로 미치는 영향 검토

- 외장재는 주거더 변형을 고려한 안전성 검토

- 교대, 작업장 등으로 훼손되는 녹지 부분 및 사면 복원계획 수립

○ 2018. 9. 20 : 투자심사(***************

-********************************************************************************

*   -*************************************************************

***********************************************

****************************************************************************

○ 2018.10. 4 : 설계자문회의(도기본*

-**********************

4		현안사항

○ 시공상 구조안정성 확보를 위해 공모 당선작 일부 변경 등 설계 보완하였으나, 이에 따라 당선자 측에서 변경설계(안)이 당초설계와는 완전히 다른 설계이므로 기존 설계비 외에 추가로 당초설계비와 동일한 설계비 요구(당선자(KILD Architects)→도시기반본부 ‘18.11.22)

1) 도시기반본부 의견 : 당선작으로는 구조상 안전성 및 시공성 곤란으로 보완설계중으며 이에따라 당선자가 요구하는 추가설계비를 도시공간개선단에서 직접 협의하여 결정할 것

2) 도시공간개선단 의견 : 설계비 증액분 지급 등의 결정은 도시기반본부 발주하여 계약한 본 설계의「계약의 과업내역 및 공동수급협정서」에 의거 결정할 사항임

○ 지속적인 구조안정성 문제제기 등으로 건설기술심의, 투자심사, 도시공원위원회 심의 등 향후 일정 지연 우려

《‘19년 진행내용》

02.28 : 도시공간개선단 주재 회의개최(참석자 : 도시공간개선단장, 반장, 도시기반본부 토목부 과장, 담당, 자연생태과 팀장, 담당, 설계업체(장맥, 차벨, 지아이))

※ 일정지연 및 현안사항에 대한 부서 간 의견교환 및 용역사 입장 검토 등

03.15 : 도시공간개선단 주재 회의개최(참석자 : 도시공간개선반장, 도시기반본부 토목부 과장, 담당, 자연생태과 팀장, 담당)

※ 현상공모 당선자의 설계비 추가 요구에 대한 도시기반본부의 입장 검토 등

03.25 : 기본 및 실시설계기간 ‘19.06.30까지 연장(도시기반본부)

04.03, 04.08(2회) : 도시공간개선반장과 용역사 3사 회의

04.15 : 도시공간개선단 주재 회의(참석자 : 도시공간개선반장, 도시기반본부 토목부 담당,     자연생태과 팀장, 담당)

04.18 : 행정2부시장 현안회의(참석자 : 도시공간개선반장, 도시기반본부 토목부장, 자연     생태과장)

※ 건설기술심의위원회 심의결과에 따른 대응방안 방침 수립 지시 등

05.29 : 도시공간개선단과 도시기반본부에 사업추진 촉구공문 발송(자연생태과-9694)

05.30 : 도시기반본부의 설계진행 알림공문 접수(토목부-9527)

06.03 : 도시공간개선단 주재 회의(총괄건축과장, 도시공간개선반장, 도시기반본부 담당,     자연생태과 팀장 및 담당 )

※ 설계비 증액여부 결정관련 자문은 총괄건축과장이 할 수 없는 사항이며,

사업추진을 위한 행정2부시장 방침수립은 부서간(도시공간개선단, 도시기반본부)

이견차이가 있음

5		조치계획

○ 관련 부서간 협의 등이 조속히 진행되어 사업이 원활하게 추진되도록,

○ 도시공간개선단에는 도시기반본부(토목부)의 의견을 첨부하여 협조 요청하고, 도시기반본부(토목부)에는 상기 협조요청 사항 등을 회신코자 함.끝.