투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재(총액계약) 납품기한 연장 의뢰(노들섬특화공간 조성사업 기계설비공사)

1. 설비부-8748(2019.6.13.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행 중인 ‘노들섬특화공간 조성사업 기계설비공사’ 관련, 관급자재 대하여         납품기한 연장을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 연장 내용

계약번호	계약업체	계약금액(원)	납품기한		비고
			당 초	변 경
*********** **********	******	***********	2019.6.30.	2019.10.20.	□ 계약금액 변경없음 □ 납기 112일 연장

나. 납품기한 연장사유 : 선행 공종(건축) 공사 일정에 맞춰 후속 공종인 설비분야 관급자재                  납품기한 조정 필요

다. 납품기한 연장 귀책소재 : 본부

라. 지체상금 부과 여부   : 미부과

따로 붙임  1. 방침서 1부.

2. 납기연장 관련문서(합의각서 포함) 1부.

	설비부장
주무관	박경철		열빛총괄과장	여인웅		설비부장	06/13 임정규
협조자
시행	설비부-8790	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8647	/전송	3708-8659	/	pkc6896@seoul.go.kr	/	부분공개(5)