문서번호	방재시설부-8534
결재일자	2019.6.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
한승균		代이병환	06/14 이임섭
협 조

서초역~방배로간 도로개설공사

동광로(명달교차로) 우회전 차로 신설 검토 보고

2019. 6

도시기반시설본부

(방재시설부)

서초역~방배로간 도로개설공사

동광로(명달교차로) 우회전 차로 신설 검토 보고

서리풀터널 개통 시 왕복2차로인 동광로의 교통정체가 우려됨에 따라 동광로에서 터널 진입을 위한 우회전 차로 신설에 대한 검토 보고임

공사개요

○ 위    치 : 서초구 방배동 내방역 ~ 서초동 서초역(대법원 앞)

○ 규    모 : 도로개설 폭 40m(왕복 6~8차로), 연장 1.28㎞(터널 400m)

○ 공사기간 : '15.10. ~ '19. 6.

○ 도 급 비 : 49,948백만원

○ 시공사 / 사업관리 : 롯데건설(주) / ㈜제일엔지니어링 외2

보고내용

○ 동광로 관련 추진경위

- `18.06.28 : 동광로(명달교차로) 우회전 차로 시행관련 설계도서 변경검토

- `18.10.12 : 도시계획시설(도로) 변경결정 및 지형도면 고시 알림

- `19.03.07 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 인가를 위한 열람공고

- `19.04.18 : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 인가 고시

(서울특별시고시 제2019-127호)

○ 동광로 우회전 차로 설치 검토

당 초	변 경

- 동광로 우회전 차로 신설을 위해 우리사업 도로구역 외 사유지(산170-15임, 5,099㎡) 접촉구간 발생(L=25m, A=62㎡)

- 보상 전 공사착수를 위해 시공사에서 토지기공승락을 받아 공사 시행함.

○ 우회전 차로 신설 및 배수계획 현황

- 우회전 차로 신설 평면도

- 우회전 차로 신설 횡단면도(선배수시설 설치)

당 초	변 경

- 배수계획 평면도

․L형옹벽 상단 V형측구 우수와 동광로 측구 우수 L형옹벽 후면에서 집수 후 본선 횡단하여 명달로 측으로 우수처리 계획 수립

당 초	변 경

○ 주요 공사물량 증․감내역

구 분	규 격	단위	당 초	변 경	증․감(△)	비 고
토 공
흙깎기	도쟈32ton	m3	181	298	117
배수공
L형측구(Type-2)	H=0.41m(인력)	m	-	59	59
L형측구(Type-4)	H=0.41m(인력)	m	175	181	6
L형측구(Type-5)	H=0.50m(인력)	m	65	-	△65
U형측구(Type-5)	H=0.65m	m	-	5	5
횡배수관	∅300~Φ800	m	49	74	25
원형맨홀	∅1.2~Φ1.5	개소	-	2	2
원심력사각수로관	400×500×2000	개소	88	121	33
포장공
아스팔트포장	기계본선	m2	294	382	88
관급자재대
레미콘, 아스콘, 흄관		식	1	1	1

- 개략공사비 : 35백만원(증)

건설사업관리단 의견

○ 서리풀터널 개통 시 서래마을에서 왕복2차로인 동광로를 통하여 명달교차로를 이용하는 차량의 증가로 인한 정체가 예상되어 서리풀터널의 이용 차량에 대한 동광로(명달교차로) 우회전 차로를 신설하여 동광로 교통흐름을 개선하는 것이 타당하며, 동광로 우회전 차로 신설에 따른 공종의 수량 및 공사비 산정은 적정하다 판단됨.

보고자 의견

○ 건설사업관리단의 검토의견이 적정한 것으로 판단되며 공기에 변동이 없으므로 실정보고 사항을 승인처리하고 추후 설계변경시 계약내역에 반영하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.