문서번호	방재시설부-8529
결재일자	2019.6.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	조경시설과장	방재시설부장
박용도	신용우	06/14 이임섭

『밤고개로 확장공사』조경공사

실정보고 사항 검토보고

2019. 6.

도시기반시설본부

방재시설부

『밤고개로 확장공사』조경공사

실정보고 사항 검토보고

우리 본부에서 추진하고 있는『밤고개로 확장공사』와 관련하여 조경수 수량정산 및 지장수목처리 변경 등에 대한 실정보고 요청사항에 대하여 검토 및 조치계획을 보고드림.

- 근거: 밤고개로 감 제2019-75호(2019.5.7.)

Ⅰ		공 사 개 요

▢ 공 사 명 : 밤고개로 확장공사

▢ 위    치 : 강남구 세곡동사거리 ~ 수서 I.C

▢ 규    모 : 도로확장(6차로→7~8차로), L=2.45km

▢ 공사기간 : 2017.5.18. ~ 2019.6.30.

▢ 총사업비 : 12,467백만원(조경 1,385백만원)

▢ 감리사/도급사 : ㈜제일엔지니어링외 1개사/큰빛종합건설(주)

Ⅱ		건설사업기술자 검토내용

▢ 검토목적

❍ 밤고개로확장공사 전체분 제1회 설계변경(2018.06.15)한 조경공사 설계도서의 현장여건을 반영한 가로수 물량 정산∙변경과 도시계획시설결정 및 실시계획변경인가에 따른 개발제한구역 행위허가 재협의 등에 따른 지장수목 처리방법 변경 등에 대한 실정보고에 대한 적정성 여부를 검토함

▢ 관련근거

❍ 공원녹지과-8740(2018.04.10.) 『도시계획시설결정(밤고개로) 및 실시계획변경인가에 따른 개발제한구역 행위허가 등 재협의건 처리 알림』

❍ 자전거정책과-4636(2019.04.25.) 『자전거도로 설치 관련 재협의 회신(밤고개로확장공사)』

▢ 검토내용

❍ 현장여건을 반영한 물량정산 및 변경

가. 변경사유

□ 밤고개로확장공사 1, 3, 5구간의 가로수 수량을 현장여건 등을 반영하여 실제 시공가능한 물량으로 현장조사하여 설계에 반영함

□ 밤고개로확장공사의 기존 4구간(SRT구간)과의 연속성을 위해 가로수의 지주목을 기존 가로수와 동일한 형식으로 변경함(당초 : 삼발이 ⇒ 변경 : 사각)

나. 주요 변경물량

공 종	규격	단위	수량		증∙△감	비고
			당초	변경
대왕참나무 식재	H4.0×R18	주	431	394	△37	1, 2, 3, 5구간 (1식 단가)
수목지지대(삼발이)	∅55×L1800	조	431	-	△431
수목지지대(사각)	∅55×L1800	조	-	394	394	1, 2, 3, 5구간

❍ 지장수목 처리 변경

가. 변경사유

□ 밤고개로확장공사 1구간 좌측(SAT No.0+100~0+450) 사면부의 지장수목은 벌개제근 및 벌목으로 설계(토목공사 시행분)되어 있으나

□ 공원녹지과-8740(2018.04.10) 『도시계획시설결정(밤고개로) 및 실시설계변경인가에 따른 개발제한구역 행위허가 등 재협의건 처리 알림』의 협의조건에 의거 임야내 지장수목 처리계획을 변경함(아까시나무 등 교목 103주, 철쭉 등 관목 650주 제거)

□ 아울러, 1구간 좌측(SAT No.0+580~0+460) 확장구간내 지장수목(느티나무 등 교목 39주, 개나리 280주))도 수형, 규격 등을 감안하여 제거

나. 주요 변경물량

공 종	규격	단위	수량		증∙△감	비고
			당초	변경
1) 토공
벌개제근		㎡	6,024	-	△6,024
벌목		㎡	6,024	-	△6,024
8) 조경공
수목 제거	아까시나무 외	주	-	142	142
관목류 제거	H1.0	주	-	930	930
수목이식	라일락 외 2종	주	-	5	5

다. 위치도

❍ 임목폐기물처리비용 반영

가. 변경사유

□ 밤고개로확장공사 1, 2, 3, 5구간의 기존 수목 제거에 따른 임목폐기물처리비용이 2구간은 반영되어 있으나, 1, 3, 5구간에 해당되는 기존 수목에 대한 임목폐기물 처리비용이 반영되어 있지 않음

□ 이에, 『서울특별시 도시기반시설본부 조경공사 설계대가기준(2015)』의 산출기준에 의거 임목폐기물 물량을 산출하고 그 처리비용을 설계에 반영하고자 함.(내역서에 포함되지 않고 원가계산서 부가세 앞에 포함됨)

나. 주요 변경물량

공 종	규격	단위	수량		증∙△감	비고
			당초	변경
임목폐기물 처리	-	ton	-	362.5	362.5	1, 3, 5구간

❍ 자전거정책과 협의내용에 따른 가로수보호판 규격 변경

가. 변경사유

□ 공원녹지과-9818(2019.04.22.)에 의거 『식수대 폭이 1.0m 미만인 구간에 대하여는 수목식재 대신 보도블럭 포장이 타당』하다는 강남구청 공원녹지과 요청이 있어

□ 현재 자전거도로 폭 1.25m인 2구간, 5구간에 자전거도로 폭을 넓히고 인접 식수대 폭을 축소하여 발생된 식수대 폭 1.0m 미만인 구간에는 가로수보호판 규격을 변경설치

【 현 황 】

【 계 획 】

【 평면상세도 】

나. 주요 변경물량

공 종	규격	단위	수량		증∙△감	비고
			당초	변경
가로수보호판	1200×1000	개소	115	24	△91	5구간
가로수보호틀	1370×1170	개소	115	24	△91	5구간
가로수보호판	1200×750	개소	-	59	59	2, 5구간
가로수보호틀	1370×920	개소	-	59	59	2, 5구간
마가목	H2.5×R6	주	36	-	△36	5구간
팥배나무	H3.0×R6	주	40	-	△40	5구간

□ 변경된 가로수보호판은 당초와 동일한 서울시 우수공공디자인 제품임(규격 축소)

□ 아울러, 5구간(좌측) 해당구간 띠녹지에 투수블럭 포장에 따라 당초 식재계획 되어 있던 아교목(마가목, 나무)의 물량을 삭제함

❍ 강남구청 의견 및 민원사항 반영

가. 변경사유

□ 강남구청 공원녹지과로부터 5구간 좌측에 설치된 목재계단 및 장애인램프 주변에 관목 식재 요청사항 반영과

□ 2구간 좌측 르노삼성 자동차전시장 및 CU 편의점으로부터 가로수로 인한 영업점 시거가 방해되지 않도록 조치∙요구하는 민원사항을 반영함

□ 상기 수종 및 물량은 강남구청 공원녹지과 가로수 담당자와 협의하여 선정, 계획함

2구간 좌측	5구간 우측

나. 주요 변경물량

공 종	규격	단위	수량		증∙△감	비고
			당초	변경
회양목	H0.3×W0.3	주	-	130	130	2구간
자산홍	H0.3×W0.3	주	-	130	130	2구간
화살나무	H0.6×W0.3	주	-	530	530	5구간
조팝나무	H0.6×W0.3	주	-	740	740	5구간

□ 2구간 회양목(H0.3×W0.3) 130주와 5구간 화살나무(H0.6×W0.3) 530주는 기존 1,2,3,5 구간 띠녹지에 반영되어 있는 물량으로 식재하고

□ 2구간 자산홍(H0.3×W0.3) 530주와 5구간 조팝나무(H0.6×W0.3) 740주는 신규 반영함

❍ 단가 적용 검토

□ 신규단가 : 지방자치단체 공사계약일반조건. Ⅶ.계약금액의 조정.1-나항(계약상대자의

책임없는 사유로 인한 경우)에  해당되는 설계변경으로 신규비목에 대하여

1. 표준시장단가(실적단가) 적용 비목 = 설계가의 100%적용

2. 품셈단가 적용 비목 = 공사계약일반조건 제 20조 2항에 따름(89.998%)

설계단가(100%) + 낙찰률(79.997%) / 2 = 89.998%

※ 공사계약 낙찰률 = 79.997%

❍ 공사비 검토

(단위:원)

공 종	금 액(천원)			비고
	당 초	변 경	증⁃감
1. 토공	3,030	-	-3,030
1) 벌개제근	1,066	-	-1,066
2) 벌목	1,964	-	-1,964
6. 부대공	2,495	1,368	-1,128
1)임목폐기물 상차비	2,495	1,368	-1,128
8. 조경공	361,039	343,193	-17,847
1) 철거공사	-	18,916	18,916
2) 이식공사	-	2,964	2,964
3) 식재공사	327,285	280,553	-46,731
4) 부대공사	6,344	12,586	6,242
5) 시설물공사	5,017	4,163	-853
6) 사급자재	22,394	24,010	1,616
직접공사비	366,565	344,560	-22,004
제경비	74,344	74,015	-329
임목폐기물처리비	-	20,879	20,879
공급가액	440,909	439,454	-1,455
부가가치세	44,091	43,945	-145
도급예정액	485,000	483,399	-1,600

▢ 건설사업관리기술자 검토의견

❍ 구간별 가로수(대왕참나무, H4.0×R18)의 식재는 버스정차대, 보행자도로 폭 등 식재조건 등을 감안하여 현장 여건에 맞춰 식재물량을 조정하고

❍ 밤고개로 구간내 기존 식재된 가로수(SRT역사 주변)의 일관성 및 연속성 등을 고려하여 지주목 형식을 기존 수목과 통일하여 사각지주목으로 변경 설치하며

❍ 도시계획시설결정(밤고개로) 및 실시설계변경인가에 따른 개발제한구역 행위허가 등 재협의건 처리 알림』에 의거 지장수목을 변경, 반영 처리함과 동시에 1, 3, 5구간에 제거한 기존 수목의 임목폐기물 처리비용을 반영함

❍ 아울러, 서울특별시 자전거정책과의 의견을 반영 결과 발생한 2, 5구간의 띠녹지 폭 1.0m 미만의 식수대의 가로수 외 수목식재계획을 삭제하고

❍ 강남구청 공원녹지과와 민원인의 의견을 반영하여 관목류 등의 수목식재를 추가로 반영하는 것이 타당하다고 판단됨

❍ 상기 내용은 현장여건에 따라 물량 증(감) 및 식재위치 변경 등이 다소 발생할 수 있으며

❍ 이에 따른 사업비 감액 1,600천원은 추후 설계변경시 반영하고자 함

Ⅲ		검토결과

▢ 본 실정보고건은 「밤고개로 확장공사」 관련하여 조경공사 조경수 수량정산 및 지장수목처리 변경 등에 대한 실정보고 건으로,

▢ 현장여건 반영에 따른 수목 수량 조정, 지장수목 처리 변경, 임목폐기물처리비 반영, 자전거정책과 협의 내용 및 강남구청 의견 및 민원사항 반영한 내용임.

▢ 건설사업관리기술자의 검토의견이 타당하므로 실정보고 사항을 승인처리하며, 추후 설계변경에 정산·반영하도록 책임건설사업관리기술자에게 통보하고자 함.

붙임: 관련공문 1부. 끝.