문서번호	방재시설부-8496
결재일자	2019.6.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
한승균		代이병환	06/14 이임섭
협 조

서초역~방배로간 도로개설공사

시점부 개착BOX 상부공간 자연석 쌓기 반영 검토 보고

2019. 6

도시기반시설본부

(방재시설부)

서초역~방배로간 도로개설공사

시점부 개착BOX 상부공간 자연석 쌓기 반영 검토 보고

시점부 개착BOX 상부공간의 안전성과 주변경관과의 미관 등을 고려하여 자연석 쌓기 반영을 위한 검토 보고임

공사개요

○ 위    치 : 서초구 방배동 내방역 ~ 서초동 서초역(대법원 앞)

○ 규    모 : 도로개설 폭 40m(왕복 6~8차로), 연장 1.28㎞(터널 400m)

○ 공사기간 : '15.10. ~ '19. 6.

○ 도 급 비 : 49,948백만원

○ 시공사 / 사업관리 : 롯데건설(주) / ㈜제일엔지니어링 외2

보고내용

○ 시점부 개착BOX 상부공간 자연석 쌓기 현황

← 내방역

개착BOX

상부공간

당 초	변 경

○ 상부공간 자연석 쌓기 반영 검토

- 터널 상부공간 활용방안 주민의견 수렴결과 녹지공간으로 조성하고자, 보행통로 및 측도(#1,2)와 접하고 있어, 조경 성토사면 토사 유출과 탈락으로 인한 보행자 및 차량통행의 불편을 미연에 방지하고 상부공간 안전성과 주변 경관과의 미관 등을 고려하여 자연석 쌓기 필요

- 자연석 쌓기 전개도

○ 주요 공사물량 증․감내역

구 분	규 격	단위	당 초	변 경	증․감(△)	비 고
부대공
자연석 쌓기	6목	ton	-	88	88
자연석 쌓기	4목	ton	-	59	59

- 개략공사비 : 49백만원(증)

건설사업관리단 의견

○ 시점부 개착BOX 상부공간이 횡단보도 및 측도(#1,2)와 접하고 있어 조경 성토사면 토사 유출과 탈락으로 인한 보행자 및 차량통행의 불편을 미연에 방지하고 상부공간 안전성과 주변 경관과의 미관 등을 고려하여 자연석 쌓기를 반영하는 것이 타당하며, 자연석 쌓기 등 반영 공종의 수량 및 공사비 산정은 적정하다 판단됨.

보고자 의견

○ 건설사업관리단의 검토의견이 적정한 것으로 판단되며 공기에 변동이 없으므로 실정보고 사항을 승인처리하고 추후 설계변경시 계약내역에 반영하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.