“소비자는 소득공제 40％, 판매자는 수수료 0％” 정답은 제로페이!
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰

우리부서에서 시행 중인 「서소문청사 주차출입구 변경 기본 및 실시설계 용역」에 대하여 다음과 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서소문청사 주차출입구 변경 기본 및 실시설계 용역

***************************************

다. 준공기한

- (당초) `18.12.21. ~ `19.6.20.

- (변경) `18.12.21. ~ `19.9.30.

*****************************************************************

*****************

붙임  1. 준공기한 연기 방침서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	역사도심재생과장
주무관	조장희		도심계획팀장	이기원		역사도심재생과장	06/14 조남준
협조자	계약1팀장	조현
시행	역사도심재생과-6486	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110 서울특별시청 11층 역사도심재생과 (태평로1가)	/
전화	02-2133-8496	/전송	02-2133-0742	/	cjh8041@seoul.go.kr	/	부분공개(5,7)