문서번호	설비부-8807
결재일자	2019.6.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		건축설비과장	설비부장
김진수		김은덕	06/14 임정규
협조

『돈화문 민요박물관 건립 통신공사』

관급자재(CCTV) 변경 검토 보고

2019. 06.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『돈화문 민요박물관 건립 통신공사』

관급자재(CCTV) 변경 검토보고

『돈화문 민요박물관 건립 통신공사』와 관련하여 건설사업관리단으로부터 제출된 관급자재(CCTV)변경 사항에 대하여 검토하고 보고 드림.

1		공사개요

□  공 사 명 : 돈화문 민요박물관 건립 통신공사

□  위    치 : 서울특별시 종로구 와룡동5-9의 2필지

□  규    모 : 지하 2층 / 지상 1층(연면적 1,384.82㎡)

□  공사기간 : 2018.01.10. ~ 2019.07.09.

□  도 급 비 : 218,967,000원(2차 137,846,000원)

□  감 리 사 : ㈜혜원까치종합건축사사무소

□  시 공 사 : 셀렉트정보기술㈜

2		관련근거

□ 혜원돈화 제2019-170호(`19.06.13.) CCTV 모니터링 변경에 따른 검토보고

3		검토내용

□ 변경사유

- 사업주관부서의 CCTV 모니터링 위치 변경 요청에 따라 민요박물관 통신실에서 통합운영

□ 변경내역

구분	품명(규격)	단위	당초	변경	증감	검토결과
CCTV	모니터	개	3	0	감3	주관부서의 요청사항 검토하여 국악당 및 민요박물관 사무실 CCTV 장비 물량 변경
	유선송·수신기	개	4	0	감4
	영상신호변환 PC	개	1	0	감1

□ 변경금액

(단위 : 원)

구 분		품 대	수수료	소 계	증·감	계약 기한	납품요구번호 (계약번호)
CCTV	변경전	49,816,000	264,390	50,080,390	감) 5,416,500	`19.8.31	12-18-2-16780-00(00177050100)
	변경후	44,424,000	239,890	44,663,890		변경없음

4		건설사업관리단 검토의견

□ 「돈화문 민요박물관 건립공사」의 관급자재(CCTV) 변경계약하여 설치함이 적정함.

5		보고자 의견

□  건설사업관리단에서 검토한 실정보고건에 대하여 검토한 결과 적정한 것으로 판단되어 변경계약 의뢰하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토보고(통신)관련 문서 1부.  끝.