문서번호	방재시설부-8524
결재일자	2019.6.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		조경시설과장	방재시설부장
송석범		신용우	06/14 이임섭
협조	치수시설과장		조성만
	주무관		한승균

- 서초역~방배로간 도로개설공사 -

조경식재·시설물 추가 및 정산 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 서초역~방배로간 도로개설공사 -

조경식재·시설물 추가 및 정산 실정보고

『서초역~ 방배로간 도로개설공사』추진 중 예비준공검사 시 보완사항과 주민요구사항에 따른 추가식재 및 시설물 설치와 실시공에 대한 수량정산을 공사에 반영한 실정 검토 보고임.

※ 관련공문 : 조경식재·시설물 추가 및 정산 실정보고(서방관리 제19-398호/2019.6.13)

공사개요

○ 공 사 명 : 서초역~방배로간 도로개설공사

○ 사업기간 : 2015.10.20. ~ 2019.06.20.

○ 규    모 : 도로개설 폭40m(6~8차로), 연장 1.28km

(터널 400m포함)

○ 공 사 비 : 49,948백만원(조경 1,194백만원)

○ 시 공 사 : 롯데건설㈜

○ 감 리 사 : ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소

감리단 실정내용 및 검토의견

○ 주요변경 내용

- 사전 준공검사 시 요구사항 반영

․개나리 식재(250주)

․계단설치(1식)

․플랜트 시공(1개소)

․수목명찰 설치(24개)

- 민원사항 반영

․잔디광장 조성(200㎡)

․잔디보호매트 설치(200㎡)

․등의자 설치(2개)

- 실시공에 대한 수량 정산 반영

○ 가로수 식재계획 변경

구 분	수 종	규 격	단위	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
가로수 터널상부	개나리	H1.0	주	-	250	250
	잔디	600×400㎜	㎡	-	200	200

○ 시설물 계획 변경

구 분	수 종	규 격	단위	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
가로수 터널상부	계단		식	-	1	1
	등의자		EA	-	2	2
	잔디보호매트	500×500×31	㎡	-	200	200
대법원앞	플랜터A	2500×1500×H500	EA	-	2	2
	플랜터A	1500×1500×H750	EA	-	1	1
	수목명찰		EA	-	24	24

○ 실시공 수량 정산(시점부 가로수 및 띠녹지대)

구 분	수 종	규 격	단위	당 초	변 경	증ㆍ감	비 고
교목	이팝나무	H4.0×R15	주	56	57	1
관목	사철나무	H1.0×W0.3	주	1,075	990	-85
	황매화	H1.0×W0.4	주	-	230	230
	화살나무	H0.6×W0.3	주	1,525	690	-835
	남천	H0.8×2가지	주	985	525	-460
	자산홍	H0.3×W0.3	주	100	30	-70
초화	구절초	8cm	본	-	50	50
	돌단풍	10cm	본	-	280	280
	비비추	2-3분얼	본	1,410	1,140	-270
	수호초	10cm	본	710	890	180
	옥잠화	10cm	본	420	400	-20
	후룩스	8cm	본	700	640	-60
	맥문동	3-5분얼	본	2,570	3,100	530
계				9,551	9,022	-529

○ 실시공 수량 정산(시점 터널상단)

구 분	수 종	규 격	단위	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
교목	소나무	H6.0xW3.0xR30	주	31	26	-5
	소나무	H5.5xW2.5xR25	주	17	22	5
	매화나무	H3.0xR8	주	41	26	-15
	산딸나무	H3.0xR8	주	-	2	2
	산딸나무	H3.0xR12	주	40	18	-22
	청단풍	H2.5xR8	주	2	-	-2
	왕벚나무	H4.0xB8	주	28	19	-9
	대왕참나무	H4.0xR12	주	31	16	-15
	서양측백	H3.2xW1.5	주	-	25	25
관목	사철나무	H1.0xW0.3	주	-	2,165	2,165
	회양목	H0.3xW0.3	주	2,050	2,100	50
	산철쭉	H0.3xW0.3	주	1,500	410	-1,090
	수수꽃다리	H1.2xW0.4	주	-	6	6
	황매화	H1.0xW0.4	주	750	1,020	270
	화살나무	H0.6xW0.3	주	4,410	2,350	-2,060
	남천	H0.8x2가지	주	-	565	565
	자산홍	H0.3xW0.3	주	5,830	6,040	210
	개나리	H0.8	주	-	250	250
초화	구절초	8cm	본	600	780	180
	돌단풍	10cm	본	4,750	4,790	40
	비비추	2-3분얼	본	1,200	1,740	540
	수호초	10cm	본	3,500	13,100	9,600
	맥문동	3-5분얼	본	16,680	11,360	-5,320
계				41,460	46,830	5,370

○ 실시공 수량 정산(종점 터널상단)

구 분	수 종	규 격	단위	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
교목	소나무	H6.0xW3.0xR30	주	6	9	3
	소나무	H5.5xW2.5xR25	주	8	6	-2
	매화나무	H3.0xR8	주	26	41	15
	매화나무	H2.5xR6	주	20	17	-3
	산딸나무	H3.0xR8	주	6	4	-2
	산딸나무	H3.0xR12	주	13	35	22
	청단풍	H2.5xR8	주	-	2	2
	왕벚나무	H4.0xB8	주	48	47	-1
	대왕참나무	H4.0xR12	주	34	49	15
	서양측백	H3.2xW1.5	주	75	50	-25
관목	수수꽃다리	H1.2xW0.4	주	20	14	-6
	황매화	H1.0xW0.4	주	500	-	-500
	화살나무	H0.6xW0.3	주	2,750	5,485	2,735
	자산홍	H0.3xW0.3	주	2,450	1,900	-550
초화	구절초	8cm	본	9,500	9,630	130
	비비추	2-3분얼	본	-	100	100
	수호초	10cm	본	9,500	-	-9,500
	맥문동	3-5분얼	본	-	1,100	1,100
계				15,456	8,859	-6,597

○ 실시공 수량 정산(종점 띠녹지대)

구 분	수 종	규 격	단위	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
교목	청단풍	H2.5xR8	주	9	14	5
	이팝나무	H4.0xR15	주	69	59	-10
관목	사철나무	H1.0xW0.3	주	7,320	5,240	-2,080
	회양목	H0.3xW0.3	주	600	550	-50
	산철쭉	H0.3xW0.3	주	2,200	3,290	1,090
	화살나무	H0.6×W0.3	주	700	860	160
	남천	H0.8×2가지	주	670	565	-150
	자산홍	H0.3×W0.3	주	1,000	1,410	410
초화	구절초	8cm	본	480	120	-360
	돌단풍	10cm	본	970	650	-320
	비비추	2-3분얼	본	2,750	2,380	-370
	수호초	10cm	본	1,080	800	-280
	옥잠화	10cm	본	-	20	20
	후룩스	8cm	본	-	60	60
	맥문동	3-5분얼	본	10,360	14,050	3,690
계				28,208	30,068	1,860

○ 실시공 수량 정산(시점, 종점 터널상단)

구 분	규 격	단위	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
잔디	600x400	m2	-	200	200
잔디	평떼	m2	835	252	-583
등의자	L1500	개소	-	2	2
방초매트 외		m	80	-	-80
계단		식	-	1	1
플랜터A	2500x1500xH500	EA	-	2	2
플랜터B	1500x1500xH750	EA	-	1	1
수목명찰	지주형	EA	-	24	24
측구수로관 외	300x300x120x2000	m	58	36	-22

○ 감리단 의견

- 주민요구사항에 따라 소나무 군락지 내 잔디광장을 조성하여 주민         들의 휴게 공간으로 조성하고, 원활한 진출입을 위하여 계단을 설치함은         타당함.

- 시점부 터널상단의 공원과 사유지의 경계를 명확히 하고 주변 환경         개선과 볼거리의 제공을 위하여 개나리를 식재함은 적정함.

- 종점부 띠녹지 불가지역(하부콘크리트)에 플랜터를 설치하여 띠녹지의         연속성을 유지함은 타당함

- 실시공에  대한 근거 및 단가 적용 등이 적정하다고 판단함.

개략공사비 내역

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
조경공
식재공사
교 목	588	581	-7	이팝나무 외
관 목	189	190	1	개나리
초 화	69	69	-
기 타	5	8	3	잔디
소 계	851	848	-3

구 분	당 초	변 경	증ㆍ감	비고
시설공사
수목보호덮개 외	36	22	-14
계단	-	5	5
플랜터A	-	7	7
플랜터B	-	3	3
수목명찰	-	1	1
소 계	36	38	2
포장 및 우배수공사
측구수로관설치 외	21	18	-3
직접공사비	909	905	-4
간접공사비	289	289	-
도급공사비	1,198	1,194	-4
관급자재대	48	57	9	잔디보호매트
총 공사비	1,246	1,251	5

검토결과

○ 공사 시점부 소나무 군락지에 휴게공간을 조성하여 민원해소

▸ 잔디광장 200㎡ 조성

○ 사전 준공검사 시 요구사항 반영

▸ 개나리를 식재하여 주변 환경개선

▸ 종점부 띠녹지 불가지역에 플랜터 설치로 띠녹지의 연속성 유지

▸ 띠녹지내 수목표찰 설치(서초구청 요구사항)

▸ 계단설치로 휴게시설 이용에 편리하도록 함.

○ 시점부, 종점부 띠녹대 및 녹지대 실시공에 대한 수량 정산이 타당함.

○ 우선 시공토록 실정보고 사항을 승인처리 하며 추후 설계변경         시 정산․반영할 수 있도록 책임건설사업관리기술자에게 통보         하고자 함.

붙임 : 실정보고 검토보고 1부.  끝.