투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경 시행 및 계약의뢰(광나루안내센터 리모델링 전기공사)

1. 우리본부에서 시행중인『광나루안내센터 리모델링 전기공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경

계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 광나루안내센터 리모델링 전기공사

나. 공사기간 : 2019. 2. 11 ~ 2019. 8. 9

다. 계약업체 : 제이에스통신건설(주) (대표 장현수)

라. 계약금액 : 95,469,910원

마. 변경사유 : 현장 여건에 따른 시공물량 변경

바. 설계변경내역

구 분		당 초	변 경	증 , 감	비 고
도급비	총공사비	95,469,910	94,741,000	감 728,910
	공급가액	86,790,828	86,128,182	감 662,646
	부 가 세	8,679,082	8,612,818	감 66,264

[단위 : 원]

사. 예산과목 : 에너지절약과생산으로원전하나줄이기, 신재생에너지보급, 한강변신재                     생에너지벨트조성, 시설비및부대비, 시설비

첨부 : 1. 설계변경 공사실정 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증 확인서 1부.

4. 변경 합의서 1부. 끝.

	시설부장
주무관	이균형		기전설비과장	정임근		시설부장	06/14 전영주
협조자
시행	기전설비과-1408	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 서울특별시한강사업본부 시설부 기전설비과	/
전화	02)3780-0672	/전송	02)3780-0744	/	tukgoll@seoul.go.kr	/	대시민공개