투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	광나루 한강공원 주차장 시설개선공사 설계변경 시행 및 계약 의뢰

1. 공원시설과-1817(2019. 6.13.)와 관련입니다.

2. 우리과에서 추진하는 아래 시설공사의 설계변경 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 광나루한강공원 주차장 시설개선공사

나. 위    치: 서울시 송파구 풍납동 49-2(천호대교밑 주차장)

다. 공사기간: 2019. 5.27. ~ 2019. 6.15.

라. 공사개요: 녹지정비 1식(이팝나무 식재 등)

마. 도 급 자: ****************

바. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 / 감
총공사비		***********	***********	**********
도급비	공급가액	***********	***********	**********
	부가가치세	***********	***********	**********
	계	***********	***********	**********
관급자재비		***********	**********	*

- 설계변경 사유: 현장여건에 따른 신규 공종 추가 발생

사. 예산과목: 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설 관리 및 개선, 한강공원 주차장 운영, 시설비(100-401-01)

붙임  1. 설계변경 방침서 1부

2. 설계변경 내역서 및 도면 각 1부.

3. 계약금액조정 검증확인서 1부. 끝.

							공원시설과장
주무관							곽영만			공원시설과장					06/14 김호규
협조자
시행			공원시설과-1827									(						)		접수											(						)
우	04770					서울특별시 성동구 강변북로 257															/
전화		02-3780-0847						/전송			02-3780-0745					/													/	부분공개(7)