문서번호	역사도심재생과-6511
결재일자	2019.6.17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관		도심계획팀장		역사도심재생과장
조장희		이기원		06/17 조남준
협 조
	주무관				정화영

공사계획 변경 및 예산 재배정 검토 보고

(덕수궁길~정동길 보행환경 개선공사)

2019.  6.

도시재생실

역사도심재생과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	*** *******
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

공사계획 변경 및 예산 재배정 검토 보고 (덕수궁길~정동길 보행환경 개선공사)

정동 역사재생활성화사업의 일환으로 추진하는 「덕수궁길~정동길 보행환경 개선공사」에 대하여 시행기관(중구 도로시설과)의 물량변경 및 신규대가 등에 따른 예산 재배정 요청에 대한 검토 보고임.

공사개요

Ⅰ

○ 공 사 명 : 덕수궁길~정동길 보행환경 개선공사

○ 공사내용 : 덕수궁길, 정동길 탐방로 조성 및 보행환경 개선(시범구간 820m)

○ 공사기간 : 2018. 12. ~ 2019. 6.

*************************************************

○ 예산과목 :

- 역사도심재생과, 지속가능한 역사문화도심 구현, 도심 역사문화자원 관리, 정동 역사재생사업, 시설비 및 부대비, 시설비(사고이월)

추진경위

Ⅱ

○ `17.  7.  : 대한제국의 길 탐방로 조성계획 용역 착수

○ `18. 6.~10. : 디자인 심의, 관련부서 협의, 문화재 현상변경 허가 등

○ `18.11.  : 공사발주 의뢰(→중구 도로시설과)

○ `18.12.  : 공사 착공(중구 도로시설과)

○ `18.  6.  : 예산 추가 배정 요청(중구 도로시설과)

요청사항 및 사유

Ⅲ

① 물량변경 및 신규대가 등으로 인한 추가 소요 예산 재배정 요청

******************

*************************

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

② 사업구간 내 도로 평탄성 정비

******************

************************************

*********************************

**********************************

처리계획

Ⅳ

**************************************************

- 물량 변경 및 신규대가 *******************

- 도로 평탄성 정비**********************

****************************

************************************

○ 예산과목

- 역사도심재생과, 지속가능한 역사문화도심 구현, 도심 역사문화자원 관리, 정동 역사재생사업, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  관련공문 각 1부.  끝.