투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	계약 변경 의뢰(창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업(1차))

우리 부에서 시행 중인「창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업(1차)」에 대하여 아래와 같이 계약 변경 의뢰하니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 창덕궁 앞 도성한복판 주요가로 개선사업(1차)

나. 도 급 비: *****************************

다. 공사기간: ************************************************

라. 도 급 자: 다이치건설주식회사

마. 계약변경(1차)-공기연장

(단위: 천원)

구 분		당 초	변 경	비고
도 급 비	전 체	*********	*********	****
	1차	*********	*********	****
공사기간	전 체	************ *************	************ *************	****
	1차	************ ************	************ *************	******

바. 공기연장 사유:

- 동절기 미착공 및 관급자재 수급지연[105일]

- 자치구(종로구) 요구사항 반영을 위한 공사중단[48일]

사. 예산과목

- 역사도심재생과, 도시개발특별회계, 지속가능한 역사문화 도심구현

도심역사문화자원 관리, 창덕궁앞 도성한복판 역사인문재생사업

붙임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 건설사업관리기술자 검토의견서 1부.

3. 준공기한연기(시공사)요청서 1부.  끝.

	토목부장
주무관	이준범		광역도로과장	박일연		토목부장	06/17 김영수
협조자	주무관	김성권
시행	토목부-10628	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미엄 플라이스 빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2568	/전송	02-3708-2599	/	qwerjb@seoul.go.kr	/	부분공개(5)