투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	총무부장
(경유)
제 목	관급자재 변경 계약의뢰(돈화문 민요박물관 건립 통신공사, CCTV설비)

1. 설비부-8807(2019.6.14.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 부에서 시행 중인『돈화문 민요박물관 건립 통신공사』에 소요되는 관급자재에 대하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 :『돈화문 민요박물관 건립 통신공사』 CCTV설비

나. 계약금액 : 49,816,000원(조달 수수료 미포함)

다. 변경현황

(단위 : 원)

품 목	금 액			납품기한	납품요구번호 (계약번호)
	변경전	변경후	증·감
CCTV	49,816,000	44,424,000	감) 5,392,000	‘19.08.31.	12-18-2-16780-00 (00177050100)

라. 변경사유

○ 사업주관서의 CCTV 모니터링 위치 변경요청에 따른 수량 변경

붙임 : 관급자재 변경 검토보고서 각 1부.   끝.

	설비부장
★주무관	김진수		건축설비과장	김은덕		설비부장	06/17 임정규
협조자
시행	설비부-8909	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	부분공개(4 5)