기성검사(감독) 조서[쉴드TBM 활성화를 위한 경제성 확보방안 용역(1회)]

문서번호	도시철도계획부-5202
수 신 자	총무부장
접수번호

결재	주무관		계획과장		도시철도계획부장
		이경훈		김동철		06/17 김진팔
협조

공 사 명	쉴드TBM 활성화를 위한 경제성 확보방안 용역
계 약 자	사단법인 한국터널지하공간학회 대표 유 한 규
계약금액	금184,651,000원				기성금액		금144,825,500원
계약일자	2018년 6 월 1 일				착공일자		2018년 6 월 1 일
준공기한	2019년 11 월 30일				기성일자		2019년 6 월 12 일
기성검사일자	2019년 6 월 14일
참고사항	- 전회까지 : 금 0원( 0.0%) - 금 회 : 금144,825,500원(78.4%) (선금공제 : 92,325,500원, 실지급액 : 금52,500,000원)
위 용역에 대한 감독 및 기성검사를 마쳤는 바 용역 설계서와 도면 및 규격서(과업지시서) 기타 계약조건의 내용과 같이 완료되었기에 본 조서를 제출함.
2019 년 06 월 14 일
현장감독공무원		도시철도계획	부	지방시설6급		직		성명	조 세 호		조세호
검 사 자		도시철도계획	부	지방시설6급		직		성명	장 기 철		장기철
검 사 자		도시철도계획	부	지방시설7급		직		성명	임 양 수		임양수
서울특별시 도시기반시설본부(분임)경리관 귀하

기성검사 내역서(1회)

1. 용 역 명 : 쉴드TBM 활성화를 위한 경제성 확보방안 용역

2. 계 약 자 : 사단법인 한국터널지하공간학회  대표 유한규

3. 계약금액 : 금184,651,000원

4. 기성금액 : 금144,825,500원

- 전회까지 : 금             0원

- 금    회 : 금144,825,500원

□ 실지급액 :  금52,500,000원 (선금공제 : 92,325,500원)

5. 용역기간 : 2018. 6. 1. ~ 2019.11.30.

- 금 회 : 2018. 6. 1. ~ 2019. 3. 31.

6. 기성내역

공 종	수량	단위	계약금액	기 성 고(%)			기 성 금 액			비고
				전회	금회	누계	전 회	금 회	누 계
쉴드TBM 활성화를 위한 경제성 확보방안
1. 직접인건비	1	식	65,775,562	0.00	79.46	79.46	0	52,267,411	52,267,411
2 기타경비	1	식	2,194,500	0.00	0.00	0.00	0	-	0
3. 제 경 비	1	식	72,353,118	0.00	79.46	79.46	0	57,494,152	57,494,152
4. 기 술 료	1	식	27,541,366	0.00	79.51	79.51	0	21,897,983	21,897,983
합 계			167,864,546	0.00	78.43	78.43	0	131,659,546	131,659,546
3.부가가치세			16,786,454	0.00	78.43	78.43	0	13,165,954	13,165,954
총 용 역 비			184,651,000	0.00	78.43	78.43	0	144,825,500	144,825,500

끝.